문서번호	역사도심재생과-10375
결재일자	2019.9.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도심계획팀장	역사도심재생과장
조장희		배성호	09/23 代이기원
협조

준공기한 연기 검토 보고

- 정동지역 한양도성 순성길 연결공사 -

2019. 9.

도시재생실

역사도심재생과

준공기한 연기 검토 보고

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 정동지역 한양도성 순성길 연결공사

○ 공사기간 : `18.12.20.~`19.9.30.

****************

************************

○ 공사내용 : 정동지역 순성길 멸실구간(돈의문터~소의문터) 연결(750m)

▢ 변경내용 검토보고

○ 준공기한 : (당초) `18.12.20.~`19.9.30.

(변경) `18.12.20.~`19.10.31.

****************

********************

***************************************************************

******************************************************************

▢ 향후계획

○ 준공기한 연기 요청 : 재무과

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 및 관련공문 각 1부.  끝.