투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공법기자재 입고 및 현장설치 일정 검토 지시)

1. 업무지시현장 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소, 주식회사 유신

2. 작 성 일 자 : 2019-09-23 13:09:15

3. 지 시 내 용

가. 코오롱e엔지니어링-STP TF19(2019.09.20.)호와 관련입니다.

나. 공법사로부터 토목공정(준공일 2019.12.20.일) 기준 기협의에 의해 진행중인 공법기자재의 제작·설치 예정공정표 송부 및 현장설치 일정 확인 요청이 있어 알려드리오니 원활한 사업수행을 위하여 공법사 기자재의 입고 및 현장설치 가능한 일정을 현재 토목공정률을 반영한 예정공정표 작성 검토하여 2019.09.30.(월)까지 작성제출하여 주시기 바랍니다.

- 협의된 일정은 공법기자재 입고 및 설치개시 : 2019년 10월부터

다. 또한 공법기자재 및 일반기자재 현안사항 검토 및 조치를 위해 감리원(기계분야) 투입을 요청하오니 공사추진에 어려움이 없도록 투입일정 등을 보고하여 주시기 바랍니다.

- 기계상주기술자 총투입 합계 : 506일, 현재까지 투입일수 242일임

- 향후 264일 투입일정 등 검토

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							최대진			열빛총괄과장					09/23 여인웅
협조자
시행			설비부-14566									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8610						/전송			02-3708-8659					/	djdj3763@seoul.go.kr												/	대시민공개