문서번호	문화시설과-8371
결재일자	2019.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화시설총괄팀장	문화시설과장
김권웅	박정추	09/23 박병현

서울거리예술창작센터 연습공간 조성 및 리모델링 사업 정산보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
사업대행계약서 7조	서울문화재단	사업비 정산보고	집행잔액 반납	2,500백만원

2019. 9.

문화시설과

서울거리예술창작센터 연습공간 조성 및 리모델링 사업 정산보고

(재)서울문화회관에서 대행한 ‘서울거리예술창작센터 연습공간 조성 및 리모델링 사업’이 완료되어 정산결과 및 집행잔액 조치계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 서울거리예술창작센터 연습공간조성 및 리모델링 추진계획

(본부장방침, 문화시설과-5371, ’17.6.27)

○ 서울거리예술창작센터 연습공간 조성 및 리모델링 사업 대행계약서

(서울시↔서울문화재단, ’17.9.29)

○ 서울거리예술창작센터 연습공간 조성 및 리모델링사업 결과 및 정산보고

(대표이사방침, 서울문화재단 경영지원팀-1693, ’19.9.5)

□ 사업개요

○ 공사내용

- 관사동 리모델링을 통한 레지던스(8개실) 및 커뮤니티공간 조성

- 제1·2취수장, 염소투입실 리모델링을 통한 연습공간 개선, 추가조성

○ 추진방법 : (재)서울문화재단 사업대행

○ 총사업비 : 2,500백만원(전액시비, ’17년 예산)

○ 사업기간 : 2017. 9.~2019. 6.

□ 그간 추진경위

○ ’17.06.27.          기본계획수립

○ ’17.09.28.          대행계약체결(서울시↔문화재단)

○ ’17.10.～11.        안전진단 실시(1취수장-C등급, 2취수장,염소투입실,관사-B등급)

○ ’17.11.~’18.07.    기본 및 실시설계

○ ’18.08.~’19.06.    공사시행

○ ’19.06.30.           준공검사 완료통보(문화재단→서울시→광진구)

○ ’19.07.27.           관사동 개관행사

□ 사업비 정산

○ 정산결과                                                       (단위: 원)

수입금액(A)	집행총액(B)	잔액(A-B)	반납예정액
2,514,437,872	2,197,558,922	316,878,950	316,878,950

○ 세부내역                                                        (단위: 원)

수입액			집행액
내역	금액		내역	금액
(1) 사업비 교부액	250,000,000		정밀안전진단	20,000,000
			설계비	69,795,000
1차교부(’17.10.17)	101,854,000
			감리비	29,530,000
2차교부(’17.12.05)	2,398,146,000
			건축/기계 감리	17,230,000
			전기/통신 감리	12,300,000
(2) 예금결산이자	14,437,872		공사비	1,759,466,000
결산이자(2017년)	328,242		건축/기계 공사	1,498,021,000
결산이자(2018년)	10,120,293		전기 공사	244,404,000
결산이자(2019년)	3,989,337 2019.09.21. 결산이자 202,957원 포함		통신 공사	17,041,000
			관급자재 구매	239,561,770
			조달구매	238,311,150
			조달수수료	1,250,620
			건설폐기물처리	31,773,000
			부대비	4,343,762
			회의수당	1,470,000
			회의경비	101,700
			세금 및 부담금	272,062
			정산보고 회계검증	2,500,000
			사업대행 수수료	43,089,390
수입 총액 (1+2)	2,514,437,872		집행 총액	2,197,558,922

□ 정산내역 검토결과

○ 서울문화재단에서 제출한 사업결과 및 정산보고서 검토결과 사업비는 사업목적 및 용도에 맞게 집행되었음

※ 사업비정산서 외부회계감사 결과 : 적정(회계법인 길인 김상수, ’19.9.5.)

○ 공사입찰에 따른 낙찰차액, 이자수입, 부가가치세 정산 등에 따라 집행잔액 316,878,950원 발생

※ 이자수입은 정산보고 이후 발생이자 202,957원 포함(’19.9.21.)

□ 집행잔액 조치계획

○ 반납금액 : 316,878,940원                                (단위: 원)

기타보조금사용잔액반환금	기타이자수입	합계
302,441,070	14,437,870	316,878,940

※ 부과금액 10원단위 절사(지방세기본법 제59조)

○ 집행잔액 세외수입 부과 :  ’19. 9.

○ 사업비정산 승인통보 및 집행잔액 반납안내 :  ’19. 9.

※ 정산완료 후 종합감사(’19년 서울문화재단 서울시 종합감사) 결과에 따른 변동사항 발생 시 수정보고

붙임 : 1. 서울거리예술창작센터 연습공간조성 및 리모델링사업 정산보고서 1부.

2. 외부회계감사 보고서 1부.