투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계금액변경 및 준공기한연장 변경계약 요청(뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역)

우리본부에서 추진 중인 ｢뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여 아래와 같이 설계금액 변경 및 준공기한 연장코자 하오니 변경계약 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2018.11.27. ~ 2019.09.24

- 용 역 비 : 174,840천원

- 용 역 사 : ㈜동일기술공사(대표:황주환)

나. 설계변경내역

구 분	계 약 금 액			비 고
	당초	변경	증감
1. 기본 및 실시설계비	141,365,000	141,365,000	-
2. 직접경비	16,620,000	16,020,000	(감)600,000
3. 손해배상보험료	961,000	961,000
4. 부가가치세	15,894,600	15,834,600	(감)60,000
총 용 역 비	174,840,000	174,180,000	(감)660,000

다. 설계변경사유 : 전문가 자문비 정산

라. 준공기한 연장 : 38일 연장

구 분	용 역 기 간	비고
당 초	2018.11.27. ~ 2019.09.24.
변 경	2018.11.27. ~ 2019.10.31.

마. 귀책소재 및 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

붙임 : 1. 검토보고서(방침서) 1부

2. 설계변경내역서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	생태환경과장
주무관	이나영		생태환경과장	09/23 최병언
협조자
시행	생태환경과-2443	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 생태환경과	/
전화	02-3780-0631	/전송	02-3780-0745	/		/	대시민공개