문서번호	도로보수과-6977
결재일자	2019.9.24.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅		양기승	09/24 송만규
협조
	주무관		이석연

2019 도로굴착복구 시행도로정비공사 추진 관련

현안사항 및 설계변경 계획 검토 보고

2019. 9.

동부도로사업소

(도로보수과)

2019 도로굴착복구 시행도로정비공사 추진 관련

현안사항 및 설계변경 계획 검토 보고

	1		공사 개요

사업명	공사개요	공사기간	공사비(천원)
			계	도급비	관급비	이설비
계			********* *********	******* *********	******* *********	****** ********
2019 도로굴착복구 시행도로 정비공사	절삭후 재포장 A=229a	’19.3.19~9.30	*******	*******	*******	******
2019 굴착복구 및 시행도로정비 노면표시 도색공사	차선도색 L=93,081m	‘19.3.27~12.26	******* ********	******* ********	****** *******	*
2019 굴착복구 및 시행도로정비 폐아스콘 운반 및 처리용역	폐기물처리 13,172톤	‘19.3.28~12.26	******* ********	******* ********	*	*

※ 공사비 중 (  ) 금액은 시행도로정비공사에서 발생하는 공사비 및 용역비 임

	2		현안 사항

❍ *****************************************************************************

❍ ******************************

********************************************

❍ *********************************************************************************************************************

❍ 포장공사 완료 내용

노선별	위 치	공사내용	공사기간
***	******* ~ ********	************************ ****************************** ******************************	********** ***********

❍ 폐아스콘 및 노면표시 물량 증가

- 포장두께 부족 해소를 위한 포장면 인상에 따라 일부 구간을 추가 정비 및 절삭 후 재포장(절삭18cm, 포장20cm)에 따른 물량증가로 노면표시 도색 및 폐아스콘 발생량이 증가되는 실정이고,

- 서울지방경찰청 요청 등에 따라 KT삼거리부터 방이삼거리 구간 및 방이사거리 동측 무단횡단금지휀스 신규 설치에 따라 기존 포장면의 노면표시 제거가 신규로 발생됨

[교통관리과-21983호(‘19. 8.30), 교통운영과-4336호(’19.3.15)]

[주요 물량변경(증·감) 내역]

구분	주요 공종	단위	당초물량	변경물량	증·감
굴착복구 시행도로 정비공사	포장절삭 및 재포장	a	***	***	*******
노면표시 공사	노면표시 도색 노면표시 제거	m m	***** *	****** ***	******** *******
폐아스콘 처리 용역	폐아스팔트 처리	톤	*****	*****	*******

❍ 시행도로정비공사 및 관련 공사/용역에 대한 개략 설계변경 결과 다음과 같이 관련 공사/용역비가 증가되는 실정임

ㆍ시행도로 정비공사

(단위:천원)

구 분	계	도급비	관급비	이전비	비고
당 초	*******	*******	*******	******
변 경	*******	*******	*******	*
증 · 감	********	********	********	********

ㆍ노면표시 공사

(단위:천원)

구분	계	도급비	관급비	이전비	비고
당 초	******	******	*****	0	0
변 경	******	******	******	0	0
증·감	********	********	*******	0	0

ㆍ폐아스콘처리용역

(단위:천원)

구분	계	도급비	관급비	이전비	비고
당 초	******	******	*	*
변 경	******	******	*	*
증 · 감	********	********	*	*

ㆍ불량맨홀정비 : 76,000천원(증)

[소요공사비 집계표]

(단위:천원)

구분	굴착복구기금				비고
	소계	시행도로 정비공사	노면표시공사	폐아스콘 처리용역
당 초	*******	*******	******	******
변 경	*******	*******	******	******
증 · 감	********	********	********	********

	3		조치 계획

❍ 불량맨홀정비 : 노후포장공사비 활용********** 정비시행

ㆍ맨홀정비 방안 : ‘2019년 불량맨홀정비공사(연간단가)’ 업체에 작업지시 우선 시공 후 정산처리

※ 포장 정비공사(1,2구역 및 긴급복구 공사 등)에서 추가로 발생하는 불량맨홀은 노후포장공사비 낙찰차액을 활용하여 정비 시행

❍ 포장 등 공사비 : 도로굴착복구기금(간접복구비) 재배정요청**********

(단위:천원)

기 배정액	집행예정액	부족예산	비 고
*******	*******	******

	4		행정 사항

❍ 도로관리과 예산 재배정 후 설계변경 재계약 및 공사 준공처리

❍ 불량맨홀정비 후 맨홀관리기관에 맨홀정비비 부과·징수

붙임 1) 위치도 1부.

2) 공사 전·중·후 사진 각 1부.

3) 불량맨홀 정비대상 1부.

4) 개략 설계변경 내역서 각 1부.

5) 관련 방침서 1부. 끝.