문서번호	시설보수과-8331
결재일자	2019.9.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	09/24 박문희
협조
	주무관		김규춘

신월IC 안전점검시 지적사항에 따른

신월IC 안전점검 결과 조치계획 보고

2019. 9.

강서도로사업소

[시설보수과]

신월IC 안전점검시 지적사항관련

신월IC 안전점검결과 조치계획 보고

우리 사업소에서 관리중인 신월IC 교량에 대한 서울시(교량안전과) 안전점검시 발생된 지적사항에 대한 조치계획을 보고 드림.

※관련근거 : 본청 교량안전과-15163호(2019.9.2.)

[신월IC 강구조시설물(용접분야) 안전점검 결과 알림]

Ⅰ		점검현황

점검일시 : 2019. 8. 30(금)

점 검 자 : 강구조교량팀

교량현황 : 신월IC

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
법외	24.7	84	남부순환로,경인고속도로입구 교차	강서도로사업소 (시설보수과)	DB-18	SPG	'77.7.30	남광토건	B

주요점검사항 : 강구조물분야(용접포함)

Ⅱ		보 고 내 용

주요 지적사항

○ 신축이음하부 누수흔적(오염) 및 누수로 인한 거더 및 받침 부식으로 누수차단 및 보수도장 필요(누수여부 확인 필요)

○ 기존 받침볼트 제거부위(구멍) 처리가 미흡하므로 실란트 등으로 구멍부위 충진 필요

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
신월IC	신축이음하부 누수 흔적(오염) 및 누수로 인한 거더 및 받침 부식	신축이음하부 누수	누수차단 및 보수도장	A1 및 A2측 6개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	기존 받침 볼트 제거부위(구멍) 처리 미흡	예전 받침 교체시 기존 볼트를 제거한 구멍	실란트 등으로 구멍부위 충진	P1 G1~G11열
	받침고무재 탈락 방지용볼트 풀림	-	볼트 재조임	A2 G8열

○ P2지점부 받침위 거더 및 브레이싱 변형발생부는 추가손상여부 지속관찰 필요

신월IC 지적사항 조치관련 추진사항

1. 현재 진행중인 정밀안전점검 용역사 현장점검 및 검토 실시

가. 용 역 사 : ㈜한국국토안전연구원  대표 오성균

나. 용 역 명 : 여의하류2교외 5개소 정밀점검용역

다. 용역사 검토 및 실정보고 의견(요약)

① 신축이음부 누수흔적(오염) 및 누수로 인한 거더 및 받침 부식부

- A1(G1,G6,G11)열, A2(G11)열 누수차단후 도장 실시

- A1, A2지점 신축이음부 하부에 물받이 설치가 필요함

② P1 교각 받침부(G1~G11) 기존받침 볼트 제거부위(구멍)는 실란트 등으로 충진하여 메움처리 필요

③ A2 G8열 받침고무재 탈락방지볼트는 조임 완료함

④ P2 지점부 받침위 거더 및 브레이싱 변형발생부는 추가 손상여부 지속관찰 필요

- 거더변형부는 추가손상여부 지속관찰(P2 G1열 및 G9열 거더)

- 지점부 브레이싱 변형부도 추가 손상여부 지속관찰 요망

(P2 G1~G2열 가로보, P2 G10~G11 가로보)

- 강재균열은 S2 G10~G11의 가로보 볼트체결 위치에서 발생하였으며 2017년 이전에 발생된 것으로 추정됨. 현재 손상부 가로보의 고정상태는 양호하며, 변형에 의한 손상발생은 없는 것으로 조사되어 지속적 관찰을 실시하는 것이 바람직함.

※ 세부사항별 조치방안 별첨

Ⅲ		검토 및 조치계획

신월IC 교량관련 지적사항에 대한 조치계획

1. 신월IC 지적사항에 대하여 정밀안전점검 용역사 검토후 보고된 사항과 같이 추후 보수가 필요한 사항으로,

2. 아래와 같이 조치하고자 함

- 교량받침부 녹발생에 따른 도장 : 2020년 연간단가 공사 시행

- P1 교각받침부 구멍 조치 : 2020년 연간단가 공사시행

- 교대 누수구간(A1,A2)에 대한 물받이 설치 : 2019년 연간단가 공사 시행(소요예산 약 30,000천원)

3. 강재 변형부에 대하여서는 지속관찰 실시

4. 상세 보수물량은 용역 진행중으로 향후 용역보고서 수록

Ⅳ		행 정 사 항

신월IC 지적사항관련 조치계획을 본청(교량안전과)에 보고

첨부 : 1) 관련공문 및 사진대지 1부.

2) 용역사 검토결과(실정보고) 1부.

3) 지적사항 세부 조치계획 1부.  끝.