문서번호	교량안전과-16297
결재일자	2019.9.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		박찬규	09/24 代박동욱
협조
	주무관		박상홍

『2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)』

작업지시 계획 보고(천호대교, 반포대교)

2019. 9.

교량안전과

(강구조교량팀)

『2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)』

작 업 지 시(요청) 검 토 보 고

천호대교·반포대교(잠수교)에 대하여 점검, 진단 및 추석대비 교량시설물 점검 결과 보수가 필요한 부분에 대하여 2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)로 보수하고자 함.

□ 관련근거

○ 추석대비 교량시설물 점검 결과보고[교량안전과-14925호(2019.8.28.)]

○ 한강교량 합류부 예고 전광판 시범설치 계획[교량안전과-11606호(2019.7.2.)]

○ 반포대교 북단 하부 메쉬휀스 설치 요청[용산구 건설관리과-18836호(2019.7.29.)]

□ 추석대비 안전점검 개요

○ 점검일시 : 2019.8.8.~ 8.9. 14:00~17:00

○ 점검구간 : 천호대교, 반포대교(잠수교)

○ 점 검 자 : 교량담당자 외 1인

○ 점검결과

- 구조적 안전성에 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않음

- 교면포장 균열, 소성변형 및 신축이음장치 균열 등 적출

적출유형	포장	교대·교각	배수시설	기 타
세부유형	포장 망상균열	균열 및 열화	토사퇴적, 배수관이탈	신축이음장치 균열
건 수	1	2	2	1

○ 조치계획

- 점검결과 보수대상에 대하여 포장 균열, 콘크리트 열화, 배수구 청소 등에 대해 한강교량 일상유지보수공사(1공구)로 정비

□ 천호대교 합류부 예고 전광판 시범설치 개요

○ 설치구간 : 천호대교 본선 및 C램프 합류부

○ 용 역 사 : ㈜트래픽스

○ 용역기간 : 2019.7.18.~10.15

○ 주요 개선내용

- 교통안전표지판 설치 4개소, 노면표지 215㎡

※ 본선 발광형 표지판 1개소는 구조검토 결과에 따라 추가 작업지시 예정

□ 보수계획

○ 주요공종

- 천호대교 : 교면방수 및 포장 19.88a, 콘크리트 단면보수 40㎡,표지판설치 4개소, 차선도색 379㎡ 등

- 반포대교(잠수교) : 휀스설치 47경간, 콘크리트 단면보수 10.25㎡, 차선규제봉 재설치 30개소, 차선도색 292㎡, 후타재 보수 1.8㎡ 등

○ 주요 작업지시 내역 및 물량 집계표

<천호대교>

연번	공 종	규 격	수량	비 고 (별첨도면)
1	교면 방수 및 포장	야간, 10a이하 야간, 도막식, t=2mm	38a	하류 A1~P7,2~3차로
2	콘크리트 균열보수	B=0.3mm, t=100mm	8m	A1, P27
3	콘크리트 단면보수Ⅰ	t=10mm, 벽체	30.31㎡	A2, P27
4	콘크리트 단면보수Ⅱ	t=30mm, 벽체	9.15㎡	P27
5	교통안전표지판 설치	역삼각▽, 2.0T×900mm(고휘)	1개소	C램프
		원형, 2.0T×∮600mm(고휘)	2개소	C램프
		삼각△, 2.0T×1200mm(고휘)	1개소	상류 P28
6	차선도색	백색,실선,B=15cm	292.47㎡	하류 A1~P7 2,3차로 C램프 전구간

<반포대교(잠수교)>

연번	공 종	규 격	수량	비 고 (별첨도면)
1	신축이음장치 보수	야간, B=30cm,t=21cm	4m	반포)하류 P3 2차로
2	후타재 보수	야간, 초속경con`c, T=20cm	1.8㎡	잠수)상류 P23
3	콘크리트 균열보수	B=0.3mm, t=100mm	17m	반포)A램프 S4,B램프 P1
4	콘크리트 단면보수Ⅰ	t=10mm, 벽체	2.42㎡	반포)상류P45, A·B램프 등
5	메쉬휀스 설치	H:2,000×W:2,000	47경간	반포)P2~P4 하부
6	차선규제봉 재설치	250*80*750	30개소	잠수)P28~P35
7	차선도색	백색,실선, B=15cm	291.9㎡	잠수)상·하류 전구간
8	차선도색	황색,실선, B=15cm	131.3㎡	잠수)상·하류 전구간
9	조류배설물 제거	인력, 2인1조	50.4㎡	반포)P14 G2,A램프 S2,S3 등

○ 소요예산 : 324백만원

※ 신규비목 및 물량 초과분에 대해서는 추후 단가협의 결과에 따라 적용

□ 조치의견 및 향후계획

○ 상기 보수계획과 같이 시설물 공용성 증가와 안전사고 예방을 위한 시급성을 고려하여 ‘2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)’에 우선 작업지시하여 정비하고 추후 설계변경 후 정산코자 함.

붙임 : 1. 수량산출서 및 물량집계표 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.