문서번호	시설보수과-5282
결재일자	2019.9.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이생기		09/24 임준빈
협 조

슬러지건조시설(토목공사) 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 09.

중랑물재생센터

(시설보수과)

슬러지건조시설(토목공사) 실정보고

우리 센터에서 추진하고 있는 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사(토목

공사) 현장 실정보고에 에 대하여 아래와 같이 보고함.

(중랑슬관 2019-368호(2019.9.24.))

1		공사개요

가. 공 사 명 : 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사(토목공사)

나. 시공자(건축토목) : ********

다. 건설사업관리단 : ********

2		실정보고내용

가. 탈수 슬러지 저장조패드확대 콘크리트 타설

1) 기계설비공사의 슬러지 이송배관 선형 변경으로 인한 기계장비 배치의 변형

으로 기존 탈수 슬러지 저장조 기초를 확대하여 장비기초로 사용 하고자 함.

-  *****************

3		건설사업단 검토내용

가. 탈수 슬러지 저장조패드확대 콘크리트 타설

1) 기존 탈수기동과 탈수슬러지 저장조 공간을 기계설비 패널-2대 및 오일           탱크 패드 확대 및 트렌치 사용으로 콘크리트 타설이 필요함

- *****************

- 적용단가 : 일위대가단가(낙찰율 적용단가(86.28%)/협의단가 적용함

4		발주처 검토의견

가. 탈수 슬러지 저장조패드확대로 인해 콘크리트 타설에 대해서는 설계변경시        반영.

5		조치의견

가. 위와 같은 현장실정보고에 대해 검토한 내용을***************

************에 변경승인 통보하여 시공 및 안전관리에 만전을         기 하고자   함.

별첨 : 실정보고서 1부.  끝.