투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	시설공사 준공기한 연기 의뢰(전체2회,3차제1회)

『노들섬 특화공간조성 토목공사』에 대하여 아래와 같이 준공 기한을 연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

2. 공사개요 : 옹벽보수공사(10,137㎡), 보도육교설치(폭3.5m, 연장139m)

3. 도 급 자 : 신성종합건설(주)

4. 준공기한 연기현황

구 분	도 급 비(원)	착공년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
전체	7,145,000,000	‘17.11.15	‘19.09.30	‘19.10.20
3차	1,745,661,000	‘19.04.28	‘19.09.30	‘19.10.20

5. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 선행공종인 건축공사(국방부건물) 설치에 맞추어 공사기한 연기.

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기보고서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	박상철		도시고속도로과장	代이상욱A		토목부장	09/24 김용제
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	토목부-17152	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8662	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개