투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	공정회의 결과에 따른 업무 협조 요청(남부도로사업소 청사 신축공사)

1. 삼우(도시기반)제19-0925-2(2019.09.25.)호와 관련입니다.

2. 지난 2019.09.18.(수)에 개최된 공정회의 결과 우리부에서 진행하는「남부도로사업소 청사 신축 설비(기계·전기·통신)공사」가 현재 공정으로 공사 기한내 준공이 어려워 추가적인 공사기간이 필요함을 알려드리며 설비분야 건설사업관리용역 연장도 검토해 주시기 바랍니다.

3. 아울러 설비공사는 건축공사 완료 후 장비 시험 및 법정검사(소방, 승강기 등) 수검 등 마무리 공정 품질확보를 위해 추가적인 기간이 필요함을 알려드리니 공정관리에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 공정회의 결과 보고(감리단) 1부.

2. 공사현황사진 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	09/25 임정규
협조자	주무관	박경철
시행	설비부-14738	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)