문서번호	급수운영과-18976
결재일자	2019.9.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김재명	代이훈재	09/25 채재일
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

공사현장실정보고서 검토보고

(회현동 배급수관 정비공사)

2019. 9.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

공사현장실정보고서 검토보고

- 회현동 배급수관 정비공사 -

우리사업소에서 시행하는 『회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사』시행 중 감독 대행자인 서울시설공단으로부터 다음과 같은 보고사항이 있어 검토 후 보고드림.

※ 관련근거: 서울시설공단 공사감독2처-9549(2019.07.17.)호

「공사실정보고서(2차) 제출」

Ⅰ		발생경위

□ 지장물로 인한 부설 도종 변경 요청

○ 6구간 정비 중 지장물로 인한 공사의 어려움으로 공사현장 실정보고서를 통한 부설 도종 변경 요청.(돌 보도 → ASP-1)

○ 7구간 정비 중 지장물 및 명동 상가 영업으로 인한 공사의 어려움으로 현장실정보고를 통한 일부구간 타절 요청.

Ⅱ		공사현황

○ 공 사 명: 회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요: D=20mm~300mm, L=1,600m

○ 공사기간: 2019. 04. 17. ~ 2019. 10. 12.

○ 계약금액: 660,623,370원

○ 계약상대자: 태평림건설(주) 대표 이동균

○ 감 독 자: 서울시설공단 위정훈

Ⅲ		보고내용 및 검토결과

□ 6구간 작업위치 변경 시행(보도→차도)

○ 구간위치: 을지로2가 6 ~ 을지로2가 11

○ 공사규모: D=200mm, L=300m

○ 설계도종: 화강판석 줄파기 포장

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계는 보도 작업으로 설계되어 있으나, 타기관 지하 매설물이 보도 전체에 부설되어 있어 관 부설이 불가.

· 지하매설물: 한전 케이블 및 주름관, 도시가스, 체신 케이블 등

○ 공단의견

- 보도구간 지하 매설물을 피해 6구간을 차도로 변경 시공함이 타당.

· 개략공사비: 증) 약 3,000천원

□ 6구간 보고 관련 사업소 검토의견

○ 검토결과: 타당함

- 기존 설계 시 ASP-1 구간은 도로굴착 통제로 인하여 보도구간 설계하였음.

- 공단 보고에 따라 구청 및 도로사업소 협의결과, 하반기 굴착승인을 득하여 공단 및 업체에 굴착허가증을 9월 20일자로 교부한 사항임.

- 현재 교통소통대책 용역 진행중이며  2019년 10월 6일 용역 준공 예정으로, 본 상수도공사가 지하장애물 및 교통소통대책 용역 등으로 지연되고 있어 전체 공정 일정상 준공기한 연장이 필요한 상황임.

□ 7구간 지장물로 인한 타절

○ 구간위치: 명동2가 55-1 ~ 충무로1가 22-4

○ 공사규모: D=200mm, L=180m

○ 설계도종: 돌포도 특수포장

○ 현황 및 문제점

- 타기관 지하 매설물이 보도 전체에 부설되어 있어 관로 부설이 불가.

· 지하매설물: 한전 케이블 및 주름관, 도시가스, 체신 케이블 등

- 본 구간 명동 지역은 상가 영업이 자정까지 진행되며, 새벽 3~4시경 물류차량 입차로 작업이 불가능함.

○ 공단의견

- 7구간을 타절함이 타당함.

· 개략공사비: 감) 약 75,000천원

□ 7구간 보고 관련 사업소 검토의견

○ 검토결과: 재검토 필요

- 확인굴착 위치 재확인하여 명확한 자료 제출 요청.

- 시장상인 및 명동 상가번영회 등 관련 단체와 협의가 필요하며, 보다 더욱 적극적인 대응이 필요.

○ 요청자료

- 구간 내 확인굴착 위치를 취약지역 관리카드 양식에 맞게 작성하여 제출 요청.

- 향후 시장상인 및 상가번영회와 사업소 직원 등 입회하여 지속협의, 설득하여 결과 제출 요청.

Ⅳ		조치의견

❍ 상기 검토 결과에 따라 6구간 차도 변경 시공에 관한 승인 사항을 공단에 통보코자 합니다.

❍ 7구간 타절 사항은 공단에 재검토 및 상인 민원 적극 대응토록 공단에 통보하여 공사 시공 관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  공단실정보고서 1부.  끝.