투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(2019 한강공원 야외수영장 보수공사 건설폐기물 처리용역)

우리 부서에서 추진중인  「2019 한강공원 야외수영장 보수공사 건설폐기물 처리용역」 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰 하오니 처리 하여 주시기 바랍니다.

□ 폐기물 처리용역

1. 공 사 명 : 22019 한강공원 야외수영장 보수공사 건설폐기물 처리용역

2. 공사기간 : 2019. 3. 7. ~ 9. 30.

3. 도 급 액 : 6,336,000원

4. 도급업체 : 주식회사 대림환경 대표 박주안

5. 준공기한 변경내용

- 당  초: 2019. 3. 7. ~ 9. 30.

- 변  경: 2019. 3. 7. ~ 10. 31.

□ 변경사유

- 수영장 운영기간중 목재데크 등 노후 손상된 시설물 및 태풍으로 인하여 파손된 시설          물의 정비와 쾌적한 수영장 운영을 위한 식재등의 사항에 대하여 추가작업을 위하여           공사기간 필요

□ 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공원시설과장
주무관	이병철		공원시설과장	09/25 김호규
협조자
시행	공원시설과-3232	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개