문서번호	도로계획과-13394
결재일자	2019.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	도로시설계획팀장		도로계획과장		안전총괄관		안전총괄실장
김대욱	윤장혁		안대희		김홍길		09/26 김학진
협 조

「내부순환도로~동부간선도로 연결체계 개선」

기본구상 용역 추진계획 보고

2019. 09.

안 전 총 괄 실

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「내부순환도로~동부간선도로 연결체계 개선」

기본구상 용역 추진계획 보고

주요 도시고속화도로인 내부순환도로-동부간선도로 합류부의 교통정체에 대한 개선방안을 마련하기 위해 도로망 연결체계를 검토하고자 함.

□ 추진배경

○ 성동일대의 내부순환로와 동부간선도로는 합류부의 교통 지정체로 인해 주요 간선도로로서 기능이 저하되고 있음

○ 성동구 성수동 일대는 동부간선도로 지하화, 서울숲 일대 명소화 사업 등 주변여건 변화 예정으로 관련사업과 연계한 교통체계 검토 필요

□ 현황 및 문제점

○ 합류부~강변북로 구간의 합분류로 인해 엇갈림 발생 및 지·정체 지속

- 엇갈림 주요 통행량 : 내부순환도로 → 강변북로 방향 1,303대/시

동부간선도로 → 성수대교 방향 1,003대/시

○ 합류부의 지·정체로 인한 도시고속화도로 본선의 대기행렬 발생

- 대기행렬 길이 : 내부순환도로 1.20km, 동부간선도로 2.60km

<위치도 및 현장사진>

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 내부순환도로-동부간선도로 연결체계 개선 기본구상

○ 용역범위 : 내부순환도로와 동부간선도로 합류부, 성수대교북단 IC,성수지역 주요 간선도로

○ 용역기간 : 계약일로부터 7개월(`20.2.~`20.09.)

○ 용 역 비 : 100백만원

□ 주요 과업내용

○ 현황 조사 및 여건 분석(기초자료분석, 관련계획검토, 국내외 사례조사 등)

○ 교통체계 개선방안 도출(공사비 및 재원조달계획)

○ 구상안 경제성 분석 및 재무 분석(기존도로와 연계한 효과분석)

□ 향후계획

○`19.10.     : 기술용역타당성 심사 의뢰

○`20.1.      : 기본구상용역 발주

○`20.2~11. : 기본구상용역 시행.  끝.