투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

우리 부에서 시행중인「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업」에 소요되는 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

▢ 납품기한 연기요청 내역

납품요구번호	품명	규격	단위	수량	납품기한		변경사유
					당 초	변 경
12-19-1-31029-00	맨홀박스	300×400×H600×t150mm	개	35	2019.06.30.	2019.12.31.	사용시기 미도래
		300×400×H700×t150mm	개	35
		300×400×H800×t150mm	개	34
		300×900×H800×t150mm	개	34
		300×900×H900×t150mm	개	40
		300×400×H900×t150mm	개	47
12-19-1-31258-00	콘크리트관	보통관 B2, Φ300×2500mm	본	200	2019.09.03.	2019.12.31.	사용시기 미도래

끝.

	토목부장
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	09/26 김용제
협조자
시행	토목부-17449	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)