문서번호	설비부-14822
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	09/26 임정규
협조

노들섬 특화공간 조성 통신공사

설계변경(운영사요구) 실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

도시기반시설본부

(설 비 부)

노들섬 특화공간 조성 통신공사

설계변경(운영사요구 반영) 실정보고 검토 보고

『노들섬 특화공간조성 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로 부터 제출된 운영사 요구사항을 반영한 설계변경 실정보고 사항을 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 통신공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.9. ~ `19.10.20.(3차, ’19.1.28~10.20)

□ 도 급 비 : *************************

□ 계 약 자 : ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.09.25. : 운영사 요구사항을 반영한 설게변경 실정보고(유탑노들 제19-453호)

□ 설계 변경 현황

○ 변경 사유

- 운영부서 요구사항 반영에 따른 물량 증감.

･ 공연장 및 다목적실 AV케이블 및 배관 추가

･ CCTV 맨홀 2개 추가 및 옥외폴 3개 삭제

･ 수방사 맨홀 및 옥외지중배관 감소

･ 수방사 도로감시용 카메라 추가에 따른 배관배선 증가

○ 주요 변경 사항

(단위:천원)

공종	주요변경내용	금 액	비고
통합배선 공사	광케이블 내외관 일체형 전선관 감소	******
AV설비 공사	공연장 및 다목적실 AV 케이블 증가	*****
CCTV설비 공사	맨홀2개소 추가 및 옥외폴 3개 감	*****
주차관제설비	주차관제 배관배선 물량 증감	*****
수방사 군부대 공사	맨홀1개 감, 통합배선 옥외지중배관 물량조종	******
수방사 군부대 공사	도로감시용 카메라 추가에 따른 배관배선 증가 등	******
소 계		******
제 경 비	VAT포함 제경비	******
합 계		******

○ 공사금액 변경 현황

(금액 : 원)

구 분	당초	변경	증감	비 고
총 차	*************	*************	**********
1 차	**********	**********	*	준공
2 차	***********	***********	*	준공
3차	***********	***********	**********

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 운영자 요구사항인 공연장 및 다목걱실 배관 배선 추가 적정하게 산출 되었으며, 수방사 도로 감시용 카메라 추가에 따른 배관배선 적정하게 산출되었음

○ 총차 공사 실정보고서 내용은 현장여건 및 운영자 요구사항에 부합하고 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리기술단에서 제출한 운영사요구사항을 반영한 설계변경도서를 검토한 결과 건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며,

○ 우선 작업지시하여 시공토록 하고 향후 설계변경 정산 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.