문서번호	토목부-17426
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	09/26 김용제
협조
	주무관		황윤기

폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물 처리용역 -

2019.09.

도시기반시설본부

(토목부)

폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물 처리용역 -

유관기관 요청사항 반영으로 공사가 연장되어 이에 발생하는 폐기물을 적법하게 처리하고자 건설폐기물 처리용역도 기간을 연장하고자 함.

※ 관련근거 : 천호수 제2019-153호(2019.09.25.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : 2010.12.31. ~ 2019.09.30.

○ 용 역 사 : 정일산업(주)

□ 설계변경 및 주요내용

○ 용역비 변경 현황                                   (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증・감(△)	비고
전체	도급액	*******	*******	*
	용역기간	*************************	*************************	******
6차	도급액	*******	*******
	용역기간	*************************	*************************	******

○ 용역기간 연장사유

- 천호대로 확장공사 공사기간이 연장됨에 따라 이에 발생하는 폐기물을 적법하게 처리하고자 용역기간 연장 필요

○ 감리단 검토의견

- 토목공사 공기연장(상징조형물 설치 및 구의야구장 주차장조성)에 따라 적법하게 건설폐기물을 처리하고자 용역기간 연장 필요

□ 조치의견

○ 감리단 검토의견이 타당하여 건설폐기물 처리용역에 대하여 용역기간을 연장하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 등 각 1부.  끝.