문서번호	공원녹지정책과-18035
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원녹지기획팀장	공원녹지정책과장
김근주		한정훈	09/26 하재호
협조

- 서울숲 미래상 설정 및 조성·운영관리 기본계획 수립용역-

실정사항(준공기한 연기) 보고

2019. 9.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

- 서울숲 미래상 설정 및 조성·운영관리 기본계획 수립용역 -

실정사항(준공기한 연기) 보고

서울숲의 조성․관리․운영 전반에 걸친 장기 마스터플랜 수립을 위한『서울숲 미래상 설정 및 조성·운영관리 기본계획 수립용역』실정사항(준공기한 연기)에 대하여 검토하고 조치계획을 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울숲 미래상 설정 및 조성·운영관리 기본계획 수립용역

○ 용역기간 : 2018. 10. 15. ~ 2019. 10. 14.

○ 계약금액 : 450,000천원

○ 계 약 자 : (재)서울연구원 서왕진

□ 실정사항 및 조치계획

○ **********************************************************************************************************************  ************ 등

○ (조치계획) 내실있는 과업 수행을 위해 용역기한 연기

- 계약금액은 변동없고, 용역사 귀책사유 없어 지체상금 미부과

□ 보고자 의견

○ 위 조치계획과 같이 준공기한 연기하고자 함

- 용역준공기한 : (당초)2019. 10. 14. ⇨ (변경)2019. 12. 14.  끝.