“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	한양도성 혜화문 보수공사 설계변경 지출품의 결재요청

한양도성 혜화문 보수공사 설계변경과 관련하여 아래와 같이 지출품의 결재요청을 하고자 합니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 한양도성 혜화문 보수공사

- 계약업체 : 한옥협동조합*********************

- 계약금액 : ******************************

나. 변경내용 : 계약금액 및 계약기간 연장

구분	변경전	변경후	비고
계약금액	*************	**************	*************
계약기간	********************	*********************	******

※ 연장사유 : 한양도성 혜화문 보수공사 진행 중 양성바름 해체 및 설치, 장식기와 교체 및 보존처리 공종이 추가되고, 장식기와(취두 2개, 용두 2개, 잡상 3개) 제작에  3개월 정도의 기간이 소요되어 부득이 공사 계약기간을 ****연장하고자 합니다.

**********************

라. 예산과목

-*******************************************************************************************

*********************************************************************************************

★주무관							구선이			도성보존팀장					代박근우					한양도성도감과장					09/27 안중호
협조자
시행			한양도성도감-9987									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-2672						/전송			2133-1063					/	ungum9@seoul.go.kr												/	대시민공개