투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	(주)중앙멀티플렉스개발
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시) 원인자 부담공사 공사기간 변경 승인 [서울숲 문화복합시설 신축에 따른 교통안전시설물 개선 설치공사]

1. 중앙멀티플렉스개발 2019-190040호(2019. 09. 26.)와 관련됩니다.

2.「서울숲 문화복합시설 신축에 따른 교통안전시설물 개선 설치공사」관련 공사기간 변경 요청 건에 대해 아래와 같이 승인하오니,

3. 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」및「노면표시 시방서」규정에 따라 공사를 시행하여 주시고 공사완료 후 T-GIS시스템 입력 및 준공확인을 요청하시기 바랍니다.

- 공사기간 변경

공 사 명		서울숲 문화복합시설 신축에 따른 교통안전시설물 개선 설치공사 (원인자부담공사-노면표시)	비 고
공사기간	당 초	2019. 8. 6. ~ 9. 30.	공사관리번호 2019-0207-066
	변 경	2019. 8. 6. ~ 11. 30.
연기사유		기상상황에 의한 도로 포장공사 지체로 노면표시 후 휘도측정시 공사기간 초과

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	최우람		도로보수과장	09/27 오재영
협조자
시행	도로보수과-4814	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02)2210-1566	/전송	02)2210-1549	/	wooram@seoul.go.kr	/	부분공개(7)