투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(총액) 변경계약 의뢰 [서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 자동제어 구매]

1. 설비부-241(2019.1.8.)호와 관련입니다.

2.「서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)」관급자재(자동제어) 변경사항이 발생하여 아래와 같이 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 자동제어 구매 변경계약 의뢰

나. 납품기한 : 총차 ‘17.12.14.~‘19. 08. 14.(2차 ‘18.11.22.~‘19.8.14.)

- 변경 없음

다. 변경사유 : 평면변경에 의한 물량 등 변경사항 발생(총차 및 2차)

라. 변경내용

계약번호 (계약상대자)	건 명		계약금액		증 ․ 감
			당 초	변 경
			(조달수수료)	(조달수수료)
*********** ************	자동 제어	총 차	318,473,000	330,170,000	증 11,697,000
		2 차	262,473,000	274,170,000	증 11,697,000
			(2,189,550)	(2,393,690)	증 204,140

※ 조달 수수료 별도임

마. 예산과목 : 거점성장추진단, 거점성장 기반 마련, 산업클러스터 조성 및 활성화,                   홍릉바이오의료앵커 조성 및 운영, 시설비 및 시설부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 관련문서[변경 내역서(총차, 2차) 및 합의서 등 포함] 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임병국		설비부장	01/08 임정규
협조자	주무관	손영일
시행	설비부-291	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5)