문서번호	설비부-608
결재일자	2019.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임병국	전결 01/15 임정규
협조

‘서울바이오허브조성 기계설비공사(2단계)’

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2019. 01.

도시기반시설본부

설비부

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

관급자재 납품기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’ 관련, 책임건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재 납품기한 연장보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)

❍ 공사규모 : 신관동(대수선)-지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

별관동(증 축)-지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,  〃

❍ 공사기간 : ‘17. 09. 29.~ ‘19. 08.14.(‘18.3.26.~‘19.8.14.)

❍ 공사금액 : 1,180백만 원(2차:1,011)

❍ 시 공 사 : ㈜우현이앤지

❍ 책임건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		관련근거

❍ 공기순환기 납품기한 연장 요청: ㈜한종홍릉 제2019-1175(‘19.1.14.)

3		관급자재(공기순환기)계약현황

품 명	계 약 자	계약금액(원)	납품기한	비 고
공기순환기	*****	***********	2019.01.18.

4		검토보고내용

❍ 납품기한 연장사유

- 선행 공종(건축 등) 공사 일정에 맞춰 후속 공종인 설비분야 관급자재 공기순환기           납품 일정 조정이 필요

❍ 납품기한 연장내용

품 명	계 약 자	계약금액	납품기한		납품요구번호 (계약번호)
			변경 전	변경 후
공기순환기	*****	***********	2019.1.18.	2019.04.14.	************

※ 계약금액 변경없음

❍ 납품기한 연장 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 책임건설사업관리기술단 검토의견

- 선행 공종(건축 등) 완료 후에 공기순환기 납품설치가 가능하므로 현장 공정 상황 등을          검토한 결과, 납품기한을 연장하여 시행함이 적절하다고 판단됨

5		보고자 의견

❍ 책임건설사업관리기술단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로,         현장 여건에  맞게 관급자재 납품기한을 연장하여 공정관리에 만전을         기하고함.

따로 붙임 : 관급자재 납품기한 연장 관련 문서  각 1부.