문서번호	한양도성도감-8818
결재일자	2019.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		곽동진	08/28 안중호
협조

<한양도성 혜화문 보수 공사>

실정보고 검토보고

2019. 8.

문화본부

한양도성도감

한양도성 혜화문 보수 공사 실정보고 검토보고

한양도성 혜화문 보수 공사에 다음과 같이 변경사항이 있어 제출된 실정보고 사항에 대한 검토 결과를 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 혜화문 보수공사

○ 공사기간 : `19. 07. 04. ~ `19. 10. 05.

○ 계약금액 : 금100,861,870원

○ 시 공 자 : 한옥협동조합********

추진경위

○ 2019. 3. 5. ~ 4. 13. : 혜화문 보수공사 설계용역 실시

○ 2019. 7. 8. : 혜화문 보수공사 착공

○ 2019. 8. 12. : 시공자 실정보고 제출

- 주요 내용 : 설계서 오류, 공종 추가 등 공사내용 변경 및 공사비 변경

검토내용

○ 공사 내용 변경

- 최초 설계서 검토 결과 설계서 오류

․ 협문 수지처리 공종에서 문화재수리 표준품셈의 목재수지처리에 적용되는 단위 오류(0.1㎥를 1㎥로 적용) 및 물량 과다 적용

․ 수장공사 귀틀 및 하인방 교체시에 동반되는 청판해체 및 설치물량 오류

공종	변경전	변경후	검토 결과
협문 수지처리	일위대가 표준품셈 1㎥로 적용	일위대가 표준품셈 0.1㎥로 적용	적용 단위 오류 정정
협문 수지처리	수지처리 물량 0.08㎥	수지처리 물량 0.04㎥	물량 조정(감소)
수장 공사	마루해체 및 설치 물량 2.520㎥	마루 해체 및 설치 3.100㎥	물량 조정(증가)

- 착수 후 공종 추가 및 물량 변경

․ 지붕공사 공종에서 장식기와(취두, 용두, 잡상)와 양성바름에 많은 균열과 탈락이 진행되고 있어 교체 및 수지처리 추가

공종	변경전	변경후	검토 결과
장식기와 설치	-	취두2, 용두2, 잡상3	공종 추가
한식기와	여와1136, 부와454, 망와16, 부막새1	여와568, 부와227, 망와0, 부막새16	물량 조정
양성해체 및 바름	-	양성바름 공종 추가 39.230㎡	공종 추가
장식기와 보존처리	-	용두 2, 잡상 6 보존처리	공종 추가

- 설계 누락으로 공종 추가

․ 문루 내 경관조명의 안전한 해체 및 설치를 위해 공종 추가

공종	변경전	변경후	검토 결과
경관조명 철거 및 설치공사	-	투광등 및 케이블 철거 및 설치	공종 추가

- 공종 삭제

․ 단청 문양모사는 불필요한 공정으로 공사 범위 제외하며, 자문회의 결과 트렌치 조사 공종 삭제, 협문 단청 공종 삭제

공종	변경전	변경후	검토 결과
문양모사	모로단청 1.2㎡	-	공종 삭제
지붕 트렌치 조사	트렌치 조사 1식	-	자문회의 결과 공종 삭제
협문 단청	협문 교체부재 단청 6.970㎡	-	공종 삭제

○ 공사기간 변경 : 변동 없음

○ 계약금액 변경 : *******************************************

※ 실정보고 단가 적용기준

- 신규비목 : 실정보고 기준일(2019년 7월) 산정단가 ×낙찰율 적용(87.859%)

- 기존비목 물량증감 : 계약단가

변경 내역

○ 원가계산서

구분		당초	변경	증 감(-)	비고
순공사원가	재료비	**********	**********	**********
	노무비	**********	**********	*********
	경비	**********	**********	*********
순공사비 계		**********	***********	**********
일반관리비		*********	*********	*********
이윤		*********	**********	*********	****************************
수리보고서		*******	*******
폐기물처리비		*******	*******	********
경관조명 철거 및 설치공사			*********	*********	*****
자문회의비		*******	*******
공급가액		**********	***********	**********
부가가치세		*********	**********	*********
도급액		***********	***********	**********
총공사비		***********	***********	**********

공 종	규 격	수 량	당 초	변 경	증 감(-)
한양도성 혜화문 보수공사			**********	**********	**********
지붕공사 [합 계]			**********	**********	**********
한식기와	****************	****	*********	*********	**********
	****************	****	*******	*******	********
	*****************	***	*******		********
	*****************	**	*****	******	******
	***************	*		*********	*********
	******************	*		*********	*********
	**	*		*******	*******
형틀제작비	*******	*		*******	*******
	*******	*		*******	*******
생석회피우기		*******	*******	*******	*******
지붕트랜치조사비		**	*******		********
장식기와 해체(취두)	***************	*		*******	*******
장식기와 설치(취두)	***************	*		******	******
장식기와 해체(용두, 잡상)	***************	**		*********	*********
장식기와 설치(용두, 잡상)	***************	**		*******	*******
장식기와 보존처리(수지)	************	*		*********	*********
양성 해체	************************	******		*********	*********
양성 바르기	************************	******		*********	*********
수장공사[합 계]			*********	*********	*******
마루 해체		*****	*******	*******	*******
마루 설치		*****	*********	*********	*******
단청공사[합 계]			**********	**********	********
문양모사	**************	******		*******	********
운반공사[합 계]			*******	*******	*******
가설자재 운반비	*******	******	******	******	*******
시멘트 운반비	***********	******	******	******	******
기와 운반비	***************	********	*******	******	*******
진흙, 백토 운반비	**************	******	******	*******	******
폐기물 상차	*****************	******	******	******	*******
폐기물처리비[합 계]			*******	*******	********
폐자재 처리 수수료	******	******	*******	*******	*******
건설 폐기물 수집 운반비	***************	******	*******	*******	*******
수지처리공사(협문)[합 계]			*******	*********	*********
목재수지처리		******	*******		********
목재수지처리		*****		*********	*********
단청공사(협문)[합 계]			*******		********
석간주(소규모)	************	******	******		*******
들기름칠(소규모)	************	******	*******		********
면닦기(수리/소규모)	************	******	*******		********
노무비	********	******	*******		********
운반공사(협문)[합 계]			******		*******
시멘트 운반비	***********	******	*****		******
목재운반비	************	******	******		*******
기와운반비	***************	********	*****		******
진흙, 백토 운반비	**************	******	******		*******

○ 수량대비표

처리 의견

○ 승인사항은 공정이행을 위해 우선 시공토록 하고 향후 설계변경 절차에 따라 설계변경 처리 하고자 함

붙임  1. 시공자 실정보고서(내역서 포함) 1부

2. 실정 보고 도면 1부.  끝.