＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	용역변경계약체결 통보[청정지역 정수센터 배출수처리시설 방류수질 개선 기본 및 실시설계 용역]

1. 기전설비과-9454(2019.09.26)호와 관련입니다.

2. “청정지역 정수센터 배출수처리시설 방류수질 개선 기본 및 실시설계 용역”건에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하였음을 알려드리니 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다..

가. 건    명 : 청정지역 정수센터 배출수처리시설 방류수질 개선 기본 및 실시설계 용역

나. 계 약 자 : *********************

다. 계약기간 : 2019.05.03. ~ 2019.10.05

라. 계약금액 : **************************

마. 변경내역 : 계약기간 변경(기간연장)

구 분	당초	변경	증·감
완수기한	**********	**********	******

사. 변경사유 : 기본계획 검증․검토 기간 추가 소요

아. 조치사항 : 변경사항에 따른 관련 서류(계약 및 선금보증서) 검토 후 계약체결

붙임 : 1. 용역변경계약서1부.

2. 계약보증서 및 선금보증서 각 1부.  끝.

	재무회계과장
주무관	이구연		재무회계과장	09/27 김분숙
협조자
시행	재무회계과-13454	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1233	/전송	02-3146-1209	/	media_lab@seoul.go.kr	/	부분공개(5)