투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제목	설계변경(2회) 심사요청(노들섬 특화공간 조성 전기공사)

1. 노들섬 특화공간조성 건설사업단 유탑노들 제19-460(2019.09.27.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 『노들섬 특화공간 조성 전기공사』중 계획부서(공공재생과) 요구사항(노들섬 하부조명 추가설치) 및 현장여건을 반영한 설계변경사항에 대하여 따로붙임과 같이 설계변경심사 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성 전기공사

나. 공사비 변경현황

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증.감	비고
총차	직접공사비	*********	*********	*********
	간접비(VAT포함)	*********	*********	*********
	ESC		*******	*********
	합계	*********	*********	*********

다. 설계변경 사유 : 계획부서(공공재생과)에서 요청한 평면 구획변경, 군부대 시설 변경 및 현장여건을 반영하여 설계변경 시행함.

라. 계약심사대상 기준 :『서울시 계약 심사 업무 처리규칙』제3조(계약심사대상사업)제5호 계약금액 20억원 이상 공사의 설계변경에 따른 1회 증액분 또는 2회 이후 누적 증액분이 당해 계약금액의 10%이상인 설계변경 공사.

따로붙임 1. 설계변경 심사요청서 1부.

2. 감리단 검토의견서 1부.

3. 설계도서(별도송부) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	代곽용길		설비부장	09/30 임정규
협조자
시행	설비부-15026	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)