문서번호	급수운영과-17179
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이재헌		09/30 최춘근
협 조

준공기한 연기보고

*********************

2019. 09.

강남수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치 :*****************

○ 작업지시 : 신설-76

○ 공사개요 : 공동신규

○ 공사기간 : 209.08.27. ~ 2019.09.30.

2. 보 고 내 용

○ 상기 위치는 건축공사 지연으로 인해 공사시행이 어려운 실정으로 수용가와 별도 일정 협의 후 공사 시행코자 합니다.(시공업체 공사 연기원 제출)

3. 조치의견

○ 상기와 같은 사유로 「2019년 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)」 의 계약업체 한배엔지니어링 주식회사 대표 강신환으로 하여금 공사 준공기간을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

․ 당초 : 209.08.27. ~ 2019.09.30.

․ 변경 : 209.08.27. ~ 2019.10.30.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.