문서번호	한양도성도감-10008
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		정일선	09/30 안중호
협 조

총차 및 1차 변경계약 검토보고

(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

문 화 본 부

(한양도성도감)

총차 및 1차 변경계약 검토보고

(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관 조성공사 문화재 상주감리용역」관련 계약자로부터 제출된 변경계약(준공기한 등)에 대한 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		용역개요

□ 용역명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 조성공사 문화재 상주감리 용역

□ 위  치: 중구 소파로 46외 13필지(43,630㎡)

□ 계약자:(주)금성종합건축사사무소 대표 ***

□ 계약금: 총차 332,133,000원(1차 266,000,000원)

□ 용역기간: 2018.11.9. ~ 2020.1.8.(1차 2019.10.8.까지)

☞ 남산공원 매점 이전거부로 명도소송이 진행중이므로 추가 연장필요

Ⅱ		변경계약 내용

□ 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건 제7절 제2조

- 계약자의 감리원 배치 및 감리용역 기간 변경계약 요청(금성 제19-395호 2019.9.24.))

□ 변경계약: 준공기한 연기 및 계약금액 변경(총차 및 1차분)

(단위:원)

구 분		변경전	변경후	증·감
계약 금액	총차	332,133,000원	332,133,000원	증감 없음
	1차	266,000,000원	266,000,000원	증감 없음
용역 기간	총차	2018.11.9.∼ 2020.1.8.	2018.11.9.∼ 2020.4.13.	96일 연장
	1차	2018.11.9.∼ 2019.10.8.	2018.11.9.∼ 2020.1.21.	105일 연장

- 변경사유: 남산공원 매점 이전지연에 따른 공사기간이 연장됨에 따라 감리용역 기간 변경

※ 남산공원 매점 이전협상 결렬에 따른 인도 및 손해배상 소송중이며 소송기간에 따라 공사 및 감리용역 기간 추간연장 필요

□ 준공기한 연기 귀책사유: 서울특별시

- 지체상금 부과여부: 미 부과

□ 감리원 배치계획 변경

- 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장이 필요하므로 감리비 증가 없이 감리원 배치계획을 변경함

구분	분야	변경전	변경후	변 경 사 유
상주 감리원	문화재 (조경)	4.2개월	0개월	조경공사는 수목이식 등이 주공종이므로 보수기술자가 수행가능 하며 필요 시 조경분야 전문가 자문 받아 수행
기술지원감리원	문화재 (실측설계)	11개월	16개월	공사전반에 관한 기술지원과 원할한 현장관리
기술지원감리원	문화재 (보존처리)	5개월	8개월	성곽 면석 등 강화처리 공종에 전문가 자문 추가

※ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리 활용, 한양도성 보존·정비남산 회현자락 보존·정비, 감리비

Ⅲ		처리의견

□ 효과적인 업무수행을 위해 공사기간 변경에 따른 용역 변경계약(총차 및 1차)추진하며 감리원 배치계획 변경을 승인하고자 함

붙임 1. 감리용역 기간(총차 및 1차) 및 감리원 배치변경 관련서류 일체

2. 감리계약 변경에 따른 합의각서 1부.  끝.