문서번호	기반시설과-3194
결재일자	2019.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	기전설비과장		시설부장
김일문	라철흠	김광찬		10/01 전영주
협 조

성수대교북단외2개소 승강기 설치공사 추진계획

2019. 10.

한강사업본부 시설부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

성수대교북단외 2개소 승강기 설치공사 추진계획

한강교량과 한강공원을 연결하는 승강기 및 계단설치 사업중 성수대교북단외 2개소에 대한 공사를 시행하여 시민들의 공원이용 편의제공과 접근성 향상에 기여하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□  사 업 명 : 성수대교북단외2개소 승강기설치공사

□  대 상 지 : 성수대교북단서측, 성수대교남단서측,동작대교북단서측

□  규    모 : 승강기및계단설치2개소 및 계단설치1개소(성수대교남단)

□  사업기간 : 2019.10. ~ 2020.12

□  총공사비 : 4,458백만원(토목: 3,842, 전기:471, 기계:145)

Ⅱ		추진경위

□ '16. 7. 20    : 한강교량 접근시설(E/V)개선계획 수립(본부장)

□ '17. 2. ~ 11. : 접근시설(E/V) 타당성검토 용역수행

□ '17. 7. 24   : 한강교량 상 접근시설(E/V)설치계획수립(본부장)

□ '17. 9. 29   : 투자심사 완료(총사업비 120억원)

□ '19.  7. 16   : 하천점용허가 신청(서울지방국토관리청)

□ '19.8.29~9.17: 공사 계약심사

□ '19.  8. 30   : 기본 및 실시설계용역 완료

□ '19.  9. 25   : 일상감사완료

Ⅲ		예산 집행현황

(단위:천원)

구 분		2019			설계금액 (계약심사)	2020년 예산(안)	부족액	비 고
		예산액	원인행위	잔여예산
합 계		2,400,000	1,298,879	1,100,181	4,458,407	3,000,000	358,226
설계	‘20년 사업대상		119,603	-				서강북단 양화북단 동호남단
공사	토 목		795,900	-	3,842,150			성수남․북단 동작대교북단
	기계·전기		383,376	-	616,257

□ 총공사비 4,458백만원으로서  ’19년 잔여 예산은 1,100백만원으로 1차분 공사추진하고 ’20년도 약 3,000백만원의 예산편성 요구중이며

□ 부족예산(358백만원)은 공사입찰에 따른 집행잔액 발생으로 공사 집행가능함.

Ⅳ		발주계획

□ 설계액 대비 현년도 예산 부족에 따라 장기계속공사로 발주

□ ’19 잔여 예산 범위내(약 1,100백만원) 토목공사 1차분 계약 시행

□ 토목분야 잔여물량 및 기계,전기 분야는 ’20년도 예산편성액에 따라 사업추진.

Ⅴ		향후일정

□ ’19.10.02 : 공사발주

□ ’19.10.24 : 공사계약 및 착공

□ ’20.11.30 : 공사완료. 끝.