문서번호	도로계획과-13587
결재일자	2019.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장	안전총괄관		안전총괄실장
정유빈	김경호	안대희	김홍길		10/01 김학진
협 조

경인로 오류IC 주변

보행환경 개선사업 추진계획

2019. 10.

안전총괄실

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

경인로 오류IC주변 보행환경개선 계획 보고

경인로 오류IC 주변 보도 단절로 보행자가 차도를 이용하는 등 통행 불편 및 안전사고 위험이 있어, 보행약자의 편의증진 및 안전한 보행환경 조성을 위한 보행로 신설사업 추진계획 보고임.

▢ 추진배경

○ 경인로 오류IC 주변 보도신설 요청 *************************

- 보도가 단절된 구간에 보행자가 차도를 이용함에 따라 안전사고 위험이 있어,
경인로 오류IC 남측(동부아파트~S-Oil)구간에 보도신설 요청.

※ ´17년부터 현재까지 보도가 단절되어 보행자 통행불편민원 다수 발생.

▢ 주변 현황 및 문제점

○ 오류IC 주변 경인로 북측으로 보도가 설치되어 있으나, 남측 일부 구간(동부 Apt~오류동 S-Oil 주유소)에 보도가 단절되어 있음.

- 경인로 북측 보도로 우회하거나 남측 차도로 보행하고 있는 실정으로, 사고발생
위험 및 보행불편 민원 발생.

○ 현재 오류IC 주변 경인로 및 남부순환로 일부구간에 보도를 설치할 계획이나, 주변 보행로와 여전히 단절되어 있어 보행동선을 고려한 보도설치 검토 필요.

	< 주변 도로(보도) 계획 >
◼ 남부순환로(개봉1동사거리주변) 평탄화 사업(도로계획과) · *********************************** · ************************************** ◼ 개봉철도고가 바닥판 성능개선사업(교량안전과) · ****************************

▢ 검토의견

○ 안전한 보행환경 조성 및 보행흐름의 연속성 확보를 위해 주변 사업과 연계하여 단절 보도구간에 대한 전반적인 개선이 필요함.

- 도로(보도) 확장 및 시설 개선 : 폭 2~3m, 연장 500m

○ 본 사업은 구로구 오류IC 주변 경인로 및 남부순환로 보행환경 개선을 위한 단순 도로확장 사업으로 자치구 사무위임 대상임.

▢ 추진계획

○ 2020년 설계 및 공사 예산***** 확보 후 사업 추진.

○ 원활한 공사(설계포함) 시행을 위해 자치구(구로구)에서 사업시행.

	< 사 업 개 요 >
○ 위 치 : 구로구 오류IC 주변 경인로 및 남부순환로 일대 - (경인로) 경인로 240(동부@)∼경인로 290(S-Oil주유소) - (남부순환로) 오류IC 하부∼개봉철도고가차도 접속부 ○ 규 모 : 보도신설 및 시설개선 폭 2∼3m, 연장 500m ○ 사업기간 : ´20. 1. ∼ ´20. 12. ********************************

▢ 향후계획

○ ´20.01.~05. : 실시 설계

○ ´20.06.~07. : 공사발주 및 착공

○ ´20.07.~12.	: 공사 시행

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.