문서번호	한양도성도감-10126
결재일자	2019.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
박근우	곽동진	10/01 안중호
협 조

한양도성 인왕산 구간 군초소 철거 및 성벽복원공사 설계변경(정산) 보고

- 한양도성 인왕산 구간  -

『군초소 철거 및 성벽복원공사』설계변경(정산) 보고

2019.10

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 인왕산구간 군초소 철거 및 성벽복원공사

설계변경(정산) 보고

『한양도성 인왕산 구간 군 초소 철거 및 성벽 복원공사』가 완료됨에 따라 변경(2회) 내용을 반영한 설계변경(정산) 처리 코자 함.

▣ 추진현황

□ ‘18.11.19.   공사 및 감리(비상주) 용역 착수

- 공 사 명 : 한양도성 인왕산 구간 군초소 철거 및 성벽복원공사

- 공사기간 : ‘18.11.16 ~ ’19.10.02(감리용역 기간 : ‘18.11.13 ~ ’19.10.02)

- 계약금액 : 885,532,000원(감리용역 계약금액 : 26,500,000원)

- 공동도급 : (주)원택건설 대표 오원진, 유한회사 서림문화재 대표 김부섭

□ ‘18.12.10   착수보고회(청와대 경호처, 군관계자) 및 문화재 전문가 자문(1차)

□ ‘19. 3. 5   설계변경 보고(1회)

- 군부대 내부 급경사지에 위치한 64-2T 초소 존치

- 스토리텔링용 존치 초소 위치 변경(63-3T → 63-1T)

- 군부대 내 급경사지에 위치한 64-2T 초소 존치

- 시공사 실정보고(설계누락 석재실험비 반영, 강관비계 안전확보를 도성 내측 추가 반영)

□ ‘19. 3. 6   문화재 전문가 자문(2차)

□ ‘19. 6.12   문화재 전문가 자문(3차)

□ ‘19. 9. 6   문화재 전문가 자문(최종)

□ ‘19. 9.17   설계변경 보고(2회)

- 문화재 전문가 자문의견 반영을 위한 62T 여장 옥개석 및 내측 석축 변경 시공

□ ‘19. 9.17   공사·감리용역 변경계약

- 변경 시공을 위한 공사·용역기간(준공기한) 변경계약(‘19.9.18 →’19.10.2)

▣ 설계변경(정산) 주요 내용

□ 강관비계 및 안전발판, 가설비계 보호막 수량 증가(실정보고)

- 가설 강관비계 안전확보를 위한 성벽 내측 수량 증가(‘19.3.5일자 설계변경 보고)

□ 철거 및 존치 초소 변경에 따른 수량 정산

- 철거 초소 개소 변경(18개소 →17개소) : 철거공사,성벽보수공사,여장보수공사 수량 감소

- 존치 초소 위치 변경(63-3T→63-1T) : 철거공사,성벽보수공사,여장보수공사 수량 증가

(63-3T: 정비여장길이 4.29M  →  63-1T: 정비여장길이 3.60M)

□ 62T 여장 변경공사(자문의견 반영) 내역 반영

- 공통가설공사, 초소 철거 공사, 여장보수정비공사 물량 증가

□ 기타 추가 공사 내역 반영

- 복원여장 주변 잔디식재 면적 정산(증가)

- 인왕산 구간 보행용 매트 설치 추가 공사 반영(길이 300m):자문위원회 의견반영

- 초소 변경(위치. 개소) 시공에 따른 운반공사 수량 정산

□ 보험료 등 납부 영수금액 정산

- 국민건강, 국민연금, 노인장기요양 보험료, 퇴직금 공제부금비 납부 영수금액 정산

□ 계약금액 변경(정산)내역( 885,532천원 → 831,567천원 : 감53,965천원)

구 분	계약금액(원)		증·감	비 고
	변경전	변경후
‣ 재 료 비	43,392,264	51,876,185	8,483,921
‣ 노 무 비	433,792,819	432,083,919	-1,708,900
‣ 경 비	198,126,661	151,520,168	-46,606,493
1. 순공사 원가	675,311,744	635,480,272	-39,831,472
2. 일반관리비	37,142,145	34,951,414	-2,190,731
3. 이 윤	92,575,202	85,538,314	-7,036,888
공급가액	805,029,091	755,970,000	-49,059,091
부 가 세	80,502,909	75,597,000	-4,905,909
총 공 사 비	885,532,000	831,567,000	-53,965,000

▣ 검토결과

□ 정산변경 계약 후 공사 준공처리

□ 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 시설비.

붙임 : 설계변경(정산) 감리검토서 1부.

설계변경(정산) 내역서.

설계변경 합의서. 끝.