문서번호	기전설비과-9615
결재일자	2019.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
이기상	조성태	10/01 유병기
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

국사봉 배수지 전기공사 실정보고 검토 보고

2019. 10.

생  산  부

(기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	국사봉배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

국사봉 배수지 전기공사 실정보고 검토 보고

아리수 안정적 공급을 위한 국사봉 배수지 건설공사 전기공사와 관련 통합건설사업관리단에서 제출한 실정보고를 검토 후 그 결과를 보고드림

Ⅰ		사업 개요

◯ 전체 사업개요

- 공 사 명: 국사봉 배수지 건설공사

- 용    량: 배수지 12,000㎥(6,000㎥ × 2지)

- 목    적: 적정 체류시간(12h) 확보를 통한 무단수 급수체계 구축

- 기    간: ’18.04.02. ~ ’19.10.09.(장기계속공사)

◯ 전기공사 개요

- 공 사 명: 국사봉 배수지 건설공사 전기공사

- 계 약 자: 실리기업 대표 김홍식

- 비    용: 550백만원(전기공사 230백만원, 관급자재 320백만원)

- 내    용: 전기공사(배관배선공사 1식, 접지 및 전기방식 1식, 조명공사 1식)

관급자재(감시제어 1식, 계측기기 1식, CCTV 1식, 조명설비 1식)

Ⅱ		실정보고 주요내용

◯ 배수지 현장여건 및 수요부서 요청에 따른 변경사항 반영

- 배수지 현장여건 및 시설물 위치변경 등에 따른 자재 규격 및 수량 변경

- 전기공사 및 관급자재 중복내역 삭제(공원등 철거비, CCTV 설치비 등)

◯ 배수지 공원등, 음수대 추가 및 CCTV 이설에 따른 설치비 반영

- 배수지 공원등 및 아리수 음수대 추가에 따른 기초 재료비 및 설치비 반영

- 배수지 상부 공원 CCTV 이설에 따른 통신 케이블 공사 및 재설치비 추가

◯ 공사비용 변경내역

(단위: 원)

구 분	내 용	당 초	변 경	증 · 감
배 수 지 내 외 부 전기공사	밸브 전원케이블 변경	849,039	651,237	▽	197,802
	UPS 전원케이블 추가	-	8,356	△	8,356
	기계실 셔터케이블 추가	-	364,722	△	364,722
	수위스위치 케이블 변경	406,885	665,095	△	258,210
	수질측정기 케이블 변경	535,563	612,234	△	76,671
	수위계 계기반 및 전원케이블 물량 삭제	2,079,733	-	▽	2,079,733
	CCTV 설치비 변경	2,523,133	362,920	▽	2,160,213
	옥외 보안등 기초 변경	968,004	639,488	▽	328,516
	저항박스 물량 삭제	1,392,600	-	▽	1,392,600
	절연볼트 ‧ 너트 추가	-	1,543,392	△	1,543,392
	배수지 전선배관 및 분전반 등 추가	1,606,445	7,398,196	△	5,791,751
소 계		10,361,402	12,245,640	△	1,884,238
배 수 지 상 부 전기공사 (공원공사)	음수대 전원케이블 및 설치비 추가	-	472,737	△	472,737
	공원등 및 분전반 철거설치비 변경	760,007	6,796,743	△	6,036,736
	CCTV 이설에 따른 공사비,배관배선비 추가	-	5,293,751	△	5,293,751
소 계		760,007	12,563,231	△11,803,224
합 계		11,121,409	24,808,871	△13,687,462

※ 각종 제경비 별도

Ⅲ		실정보고 검토결과

◯ 케이블 규격 및 설치 위치 변경 등은 현장 여건 및 수요 부서 의견을  수렴 후 변경한 사항으로 건설사업관리기술자의 검토내용이 타당하여 승인

◯ 선행공정(토목)에서 기존 공원등 철거함에 따라 중복된 철거비용을 삭제하고 신규 공원등 설치비 및 기존 CCTV 이설비를 반영 승인

Ⅳ		향후계획

◯ 국사봉 배수지 건설공사 사업예산의 99% 이상을 추산(지급 예정)하여 향후 설계변경 등 원활한 사업추진을 위해 낙찰차액 사용이 필요

- 감시제어시스템 낙찰차액 사용방침 수립 예정

◯ 상기사항 반영 및 안전관리비 등 제경비 정산 후 설계변경 시행

붙임: 1. (국사봉 배수지 건설공사) 전기공사 실정보고 1부.

2. (국사봉 배수지 건설공사) 전기공사 변경내역 1부.  끝.