＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	옥내배관 교체지원 일일보고〔(19. 10. 1. (화)〕

금일 옥내배관지원팀 일일업무 현황을 아래와 같이 보고합니다.

○ 공사비지원 상담

(단위 : 건)

구 분	계(대상+비대상)	세대배관	공용배관	컨설팅 대상	컨설팅 비대상	비대상 사유
누계	***	***	*	***	**
금 일	*	*	*	*	*
도봉	*	*	*	*	*	갱생 받음
노원	*	*	*	*	*
강북	*	*	*	*	*	비내식성

○ 공사비 지원금 지급 현황

구분	계		공용배관		세대급수관
	가구수	금액(천원)	가구수	금액(천원)	가구수	금액(천원)
금일	-	-	-	-	-	-
누계	******	*********	*****	*********	***** ***********	*******

※ *********************************달성 중

○ 공용배관(아파트)

연번	단지명	건축년도	세대수	추진 현황
1	******	’90	449	공사완료(준공검사 준비 중)
2	******	’89	568	공정 80%(10월 준공 예정)
3	******	’91	525	공사완료(준공검사 준비 중)
4	****	’87	1,454	공정 50%(11월 준공 예정)
5	******	’87	1,320	공정 40%(11월 준공 예정)
6	****	’89	685	공정 35%(11월 준공 예정)
7	*******	’88	2,064	설계도서 검토 진행 중
8	*******	’87	2,029	설계 진행 중, ’20년 준공
9	*******	’87	2,213	입주자대표회의 의결 진행 중
10	*******	’88	2,634	설계완료, 업체 선정 중, ’20년 준공
11	********	’88	1,944	설계 진행 중, ’20년 준공
12	********	’89	939	설계완료, 업체 선정 중,’20년 준공
13	********	’89	2,265	’19.11.15.까지 업체 선정, ’20년 공사 완료 예정
14	****	’88	1,200	설계검토 회신, 자치구 자문의뢰 중, ’20년 준공
15	*******	’91	900	’20년 교체공사 추진 중(개별난방, 급수배관교체)

○ 자부담 교체 조사 현황

(단위 : 가구)

연번	계	아파트	주택	다세대주택	다가구주택	단독주택
누계	*****	***	***	*****	**	**
금일	**	*	*	**	*	*

○ 기타 업무

- 아파트 공용배관 설계도서 검토(중)

· 검토사항 : 급수관경 결정, 시방서, 배관도면 등 검토

- 상계주공1단지아파트 공용배관 컨설팅 보고서 작성

· 교체공사 설계를 완료하여 검토 중에 있으며, ’88년 건축된 노후 배관으로 교체가 시급한 실정으로 아파트 관리주체(관리사무소, 입주자대표회의)에서 ’20년 상반기 준공 목표로 추진중에 있음

- 행정사무감사자료(본부) 작성

· 2019년 수질검사 결과자료(1~9월) 및 아파트(150세대이상) 교체 현황 자료

- 노후수도관 부실시공 민원회신

· 노후 수도관 교체 시공 시 꺽인 부분에 연결부품을 사용하지 않아 누수가 발생,          피해자가 없도록 조치요청

⇒ 추후 공사 신청이 들어왔을 때 연결부품 사용토록 안내.  끝.

주무관	정혜승		주무관	장용수		현장민원과장	10/01 서기환
협조자
시행	현장민원과-17277	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동) 북부수도사업소	/
전화	02-3146-2918	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)