문서번호	토목부-17785
결재일자	2019.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
차승환	代윤창렬	김용제	10/01 김승원

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리) 용역 -

설 계 변 경 검 토 보 고

2019. 9.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리) 용역 -

설계변경검토보고

『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계』건설사업관리(설계감리) 용역자가 제출한 계약금액 변경 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ (제일(발)2019-2666, 2019. 9. 3. 계약변경 요청)

□ 추진근거

❍ 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역 설계변경 검토보고 (토목부-15202, 2018. 8. 31.)

❍ 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역 설계변경 검토보고 (토목부-11277, 2019. 6. 2 5 .)

❍ 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역 계약 변경 요청 (제일(발)2019-2666, 2019. 9. 3.)

□ 사업개요

1. 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계

❍ 위    치: 서울특별시 영등포구 양평동 월드컵대교 남단

❍ 규    모: 연결로 5개소, 지하차도

- 남단 IC 연결로(폭 1차로): 교량 및 교각 형식 검토

- 강남방향 연결로(폭 1차로): 접속방법 개선(지하차도 → 교량)

- 접속교: 연결로 신설 및 변경에 따른 종단선형 검토

❍ 감리기간: 2017. 8. 11. ~ 2019. 11. 30.

❍ 감리금액: 162,235,000원(월드컵대교∼서부간선도로간 감리비용 포함)

❍ 감 리 사: ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

2. 월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치 설계

❍ 위    치 : 월드컵대교∼서부간선도로간

❍ 규    모

- 램프 A (서부간선 → 월드컵대교) : 폭 6.95m, 연장 279.1m

- 램프 B (노 들 로 → 월드컵대교) : 폭 6.95m, 연장 692.1m

- 램프 C (월드컵대교 → 서부간선) : 폭 6.95m, 연장 360.7m

- 램프 C-1 (노 들 로 → 서부간선) : 폭 5.75m, 연장 289.9m

❍ 용역기간 : 2018. 4. 1. ~ 2019. 11. 30.

❍ 설 계 자 : 서서울도시고속도로(주) - ㈜유신, ㈜서영엔지니어링

□ 추진경위

❍ 2017. 2.16.: 월드컵대교 남단 보완설계 추진계획보고 (부시장 보고)

❍ 2017. 3.28.: 월드컵대교 남단 보완설계 시행계획 검토 보고

❍ 2017. 4.26.: 설계용역 추진방안 보고

❍ 2017. 8.11.: 보완설계용역 계약 및 착수

❍ 2018. 4. 5.: 월드컵대교 남단 연결로 설치계획 보고(도로계획과-4530)

❍ 2018. 6.26.: 건설사업(설계감리)관리 용역 추진 계획 보고

❍ 2018. 8.31.: 설계변경 검토보고(토목부-15202)

❍ 2018.10.25.: 계약 변경 요청(제일(발)2018-3305)

❍ 2019. 6.25.: 설계변경 검토보고(토목부-11277)

❍ 2019. 9. 3.: 계약 변경 요청(제일(발)2019-2666)

□ 설계변경 보고

❍ 월드컵대교 남단 연결로 보완설계 용역 설계변경(BIM설계 및 교통관리시스템, 추가 연결로, 인공폭포, 보도육교, 투척방지시설, 침전조 덮개, 신규 과업 추가)에 따른 ‘월드컵대교 건설사업(설계감리) 용역’ 설계 변경

❍ 설계변경내역

구 분	계약금액(원)	용역기간
당 초	162,235,000	'17. 8. 11. ~ '19. 11. 30.
변 경	389,526,000	'18. 8. 11. ~ '19. 11. 30.
증 감	증)227,291,000	변동없음
비 고

❍ 변경사유 : 월드컵대교 남단 연결로 보완설계 용역에 대한 과업추가 설계 변경에 따른 건설사업관리 용역 설계변경

붙임 1. 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역 설계변경 검토보고 (토목부-15202, ‘18. 8.31.) 1부.

2. 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역 설계변경 검토보고 (토목부-11277, ‘19. 6.25.) 1부.

3. 계약 금액 변경 요청 1부.

4. 변경 내역서 1부.  끝.