문서번호	도로보수과-7347
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅	양기승	10/02 송만규
협 조

『2019년 관내 포장도로 굴착복구공사』

제2회 기성준공 검토 보고

2019. 9.

동부도로사업소

(도로보수과)

『2019년 관내 포장도로 굴착복구공사』

제2회 기성준공 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 『2019년 관내 포장도로 굴착복구공사』와 관련하여 제2회 기성검사에 대한 검토결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 제2회 기성검사 결과 보고 : 한국건설관리공사 토목관리처-416호(2019.09.27.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2019년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2019. 3.26. ~ 2019. 12. 26.

□ 공사개요 : 굴착복구 A = 162a, 차로단위복구 A = 216.5a

□ 도 급 비 : ********

□ 도 급 자 : **********************************

Ⅲ		기성내용

(단위:원)

계약금액	전회까지 기성금액	금 회 기성금액	누 계 기성금액	누계기성율	잔여금액
*************	***********	*************	*************	*****	***********

Ⅳ		기성내역 검토

□ 기성 개요

- 기성대상 : 2019 - 1번 ~ 124번 작업지시분 중 작업완료분 53건

- 공사기간 : 2019. 4. 08. ~ 8.25.

(작업지시일 : 1차 ’19.4.8, 2차 ’19.5.8, 3차 ’19.5.30, 4차 ’19.7.2, 5차 ’19.8.21)

□ 기성 물량 검토 : 적정

- 굴착복구(t=80cm) : 45건, A = 99.9a

- 표층확폭복구(t=5cm) : 13건,  A = 5.1a

- 표층차로복구(t=5cm) : 20건,  A = 113.9a

□ 기성 금액 검토 : 적정

- 기성신청금액 : ***************

- 검토결과 : 수량산출, 기성금액 산정 등이 적정한 것으로 판단됨

Ⅴ		조치계획

□ 본 공사의 건설사업관리용역 기술지원기술자와 책임기술자의 현장확인 등 검토 결과 서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수공사 시방서 등 관련규정에 적합하게 시공되었다는 검사조서를 제출하였으므로

□ 한국건설관리공사에서 제출한 기성자료를 근거로 2019년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 제2회 기성 준공을 시행하고자 함.

붙임  1. 기성검사 결과보고 및 사진 각 1부.

2. 제2회 기성내역서 1부.

3. 제2회 기성 주요 현황

4. 제2회 기성 위치도 1부.  끝.