문서번호	물순환정책과-16796
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
박필관	유통희	10/02 정훈모

「2019년 상반기」

민방위 비상급수시설 현황 조사 결과 보고

2019. 10.

물순환안전국

(물순환정책과)

「2019년 상반기」

민방위 비상급수시설 현황 조사 결과 보고

서울시 관내 민방위 비상급수시설에 대한 2019년도 상반기 관리현황을 조사하고 그 결과를 보고드림.

□ 조사개요

○ 대    상 : 서울시 민방위 비상급수시설

○ 조사기관 : 서울시 25개 자치구

○ 기    간 : 2019. 7. 1.~ 8. 31.(자료 기준일: ‘19. 6.30.)

○ 기초자료 : 2018·19년 상반기 민방위시설

□ 민방위 비상급수 시설현황

○ 총 시설수 : 1,244개소(음용 : 161, 생활용 : 1,083)

○ 재정투자시설 : 국·시비 및 시비로 설치한 전용시설 182개소

○ 공공지정시설 : 민방위로 지정된 공공·민간 지하수시설 1,062개소

□ 민방위 용수 확보현황

○ 소요량 244천톤 중 193천톤 확보(79.3%), 부족51천톤

○ 음용수  87천톤 중   18천톤 확보(21.4%), 부족68천톤

(2019년 상반기 기준)

구 분	소요량 (천톤/일)	확보량 (천톤/일)	과부족	확보율 (%)
계	244	193	▵51	79.3
음용수	87	19	▵68	21.4
생활용수	156	174	+18	111.8

※ (확보 기준 -행자부 지침) : 1인 25ℓ/일(음용 9ℓ, 생활 16ℓ), 인구 9,757,144명 (‘19년 6월 기준)

□ 자치구 별 확보율 분석

○ 확보율

- 79%(시 평균)이하 : 성동구 외 15개 자치구

- 79%(시 평균)~100% 미만 : 중랑구 외 3개 자치구(연두색)

- 100% 이상 : 서초구 외 5개 자치구

<확보율 구간별 자치구 현황>

○ 음용 확보율

- 21%(시 평균)이하 : 종로구 외 14개 자치구

- 21%(시 평균)~50% 미만 : 노원구 외 7개 자치구

- 50% 이상 : 성동구, 영등포구

<음용수 확보율 구간별 자치구 현황>

□ 2019년도 추진현황 및 분석

○ 추진현황

분야별	규모 (개소)	실적 (개소)	확보량 (톤/일)	추진현황	비고
① 비상급수시설 신규설치 - 1,050톤/일, 7개소	7	2	300	도봉구 등 2개소 개발완료, 노원구 등 4개소 부지 협의중
②. 음용 수질개선 - 1,101톤/일, 6개소	6	1	183	관악구 1개소(민방위 교육장) 개선완료, 종로구 등 4개소 금년말 완료 예정
③ 아리수 배수지 지정 - 6,627톤/일, 101개소	101	28	2,341	마포구 등 6개소 지정 완료, 용산구 등 14개소 미지정
④. 생활용 민방위 시설 음용변경 - 11,989톤/일, 62개소	61	31	-	31개소 수질검사 완료, 30개소 미검사 검사완료 31개소 중 14개소 음용적합	미지정

○ 문제점 및 분석

- (비상급수시설 신규개발) 상반기 경과 하였으나, 신규개발 추진실적 미비

→ 비상급수시설 신규설치시 부지확보 어려워 추진율 저조

- (음용 수질개선) 상반기 경과 하였으나, 수질개선 추진실적 미비

→ 배정예산 부족 및 신규사업 시행으로 인한 업무추진 어려움

- (아리수 배수지 민방위 지정) 시설현황 제공 및 자치구 민방위 지정 독려

하였으나, 추진율 저조

- (생활용 민방위 시설 음용 변경) 은평구 등 10개 자치구 수질검사 미실시(총 30개소)

□ 향후 추진계획

○ 민방위 시설 신규개발 부지 협의시 자치구 민방위-지하수 부서간 협조를 통한 행정적·기술적 업무 협의 독려

○ 수질개선 사업 해당 자치구에 정수필터 설치관련 기술적 지원 및 관련자료 제공

○ 생활용 민방위시설 중 음용 적합시설 금년 말까지 음용변경 완료, 미검사 시설 수질검사 및 적합시설 음용변경 자치구에 요청

○ 아리수 배수지 시설 민방위 지정 일괄추진(서울시 민방위담당관)

□ 행정사항

○(민방위담당관) 시설 지정 등 자치구 관련부서의 업무 총괄 지도 조정 강화

- 아리수 배수지 시설 민방위 지정 일괄 추진

○(물순환정책과) 관련부서와 자치구에 조사자료 통보

- 연차별 투자계획에 따른 재정투자시설 예산 편성

○(자치구 민방위업무 담당부서)

- 지하수 이용시설 추가 지정 적극 추진

- 민방위 비상급수시설 재정투자시설 후보지 확보 관련 행정업무 적극 협조

- 음용변경대상 생활용 비상급수시설(14개소) 음용 용도변경 추진

○(자치구 지하수관리 담당부서)

- 민방위 비상급수시설 재정투자시설 후보지 확보 및 설치 추진

- 지하수 이용시설 추가 지정에 따른 업무 적극 협조

붙임  1. 민방위 비상급수시설 현황자료(‘19. 6. 30.기준) 1부.

2. 자치구별 민방위 비상급수시설 확보현황(‘19. 6. 30.기준) 1부.

3. 전년대비 서울시 민방위 비상급수 확보 현황 및 분석 1부.

4. 민방위 지정대상 지하수관정(비음용, 음용) 1부.

5. 서울시 아리수 배수지 현황 1부.

6. 음용 변경 민방위 시설 수질검사 현황 1부.  끝.