문서번호	시설관리과-23615
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
기전팀장		시설관리과장		동부수도사업소장
정인주		천성훈		10/02 이구석
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2019년 상수도관 전기방식공사 설계변경(정산) 검토보고

2019. 10.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

상수도관 전기방식공사 설계변경 (정산) 검토보고

2019년 상수도관 전기방식공사에 대해 책임감리용역업체의 설계변경(정산) 검토서 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 설계변경(정산) 검토보고서 제출 (삼우전기-2019-257, 2019.10.1.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 상수도관 전기방식공사

○ 계약기간 : 2019.4.18.~ 10.14.(감리기간 : 2019.4.18.~ 11.7.)

○ 공사·감리업체 : 현대계장공업(주)(시공사), ㈜삼우전기컨설턴트 (감리사)

○ 계약금액 : 금 320,395,358원 (감리금액 : 금 47,738,400원)

○ 공사내용 : 상수도관(D=900~1,350mm L=4,550m) 3개 구간 신설

- 정류기 및 정션(Junction)박스 설치 3개소 및 기타 시설보완

- 양극공 보링(D=300mm, H=30m) 및 양극매설 9개소 등

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	계약금액	변경금액	증·감	비 고
총 공사비	320,395,358	314,677,000	감>5,718,358

□ 설계변경 주요내용

○ 양극(+) 전기케이블 포설, 양극(+)공 에어벤트 보호맨홀, 신축이음관 및 밸브접합과 음극(-)선 등 시공물량 증·감 발생

- 양극(+) 전기케이블 포설물량 감소 : 108m(4,030m → 3,933m)

- 양극(+)공 에어벤트 보호맨홀 설치물량 증가 : 9개소

- 보조측정함(매립형→ 맨홀형) 설치물량 감소 : 2개소(6개소→ 4개소)

- 기존 정류기반 PCB 콘트롤러 및 기준전극 정비물량 증가 : 2개소

- 신축이음관 및 밸브접합관 음극(-)선 설치물량 감소 등

○ 기타 보험료 및 안전관리비 정산 등

- 건강보험료, 국민연금보험료, 연금보험료 및 산업안전보건관리비

【외부전원법 3개 구간 공정별 시공사진 현황】

《양극(+)공 천공》	《ANODE 설치작업》	《에어벤트 보호맨홀》

□ 조치계획

○ 상기와 같이 책임감리용역업체에서 제출한 설계변경(정산) 검토보고서에 대해 검토한 결과 적합하므로 설계변경(정산) 계약시행하고자 함.

□ 향후일정

○ 2019. 10. : 준공처리 (전기방식공사 책임감리원)

붙  임 : 1. 설계변경(정산) 검토보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경도서 1부

4. 합의서 1부.  끝.