투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리) 용역 설계변경 계약 의뢰

1. 토목부-17785(2019. 10. 1.)호와 관련입니다

2. 우리부에서 시행 중인「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리) 용역」에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리) 용역

나. 용역규모 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계(연결로 5개소, 지하차도 변경 등)

다. 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사무소

라. 설계변경내역                                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
용역금액	162,235,000	389,526,000	증)227,291,000
용역기간	'17.8.11~'19.11.30.	변경없음

마. 설계변경사유 :『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역』에 대한 과업추가 설계 변경에 따른 건설사업관리 용역 설계변경

바. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설,

시설비및부대비, 감리비

붙임  1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 합의각서 1부.(별도송부).  끝.

	토목부장
주무관	차승환		토목설계과장	代윤창렬		토목부장	10/02 김용제
협조자
시행	토목부-17938	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	chsh155@seoul.go.kr	/	부분공개(5)