문서번호	토목부-17977
결재일자	2019.10.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	10/04 김용제
협조

디자인 그레이팅 설치 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

디자인 그레이팅 설치 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

빗물받이 스틸 그레이팅이 BF(장애물없는생활환경인증제)심사결과에 따라 디자인 그레이팅으로 변경 설치코자 보고하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 9.

○ 도 급 비 : 7,194백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주)

○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 현 황

❍ 스틸그레이팅(400×500)으로 설치 되어 있음

품 명	규 격	덮개 수량(개)				보차도부
		서측	동측	군부대	소계	서측	동측
디자인그레이팅	집수정 500*600*50*6T	37	9	4	50
디자인그레이팅	빗물받이 400*500*50*6T	73	30	3	106	31	10
합 계		110	39	7	156	31	10

□ 검토내용

❍ 장애물없는생활환경인증제(BF) 심사결과에 따라 변경

❍ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증감 금액
1. 직접공사비 계	-	13,224,496	13,224,496
2. 제경비계	-	1,434,080	1,434,080
순공사원가	-	14,658,576	14,658,576
3. 일반관리비	-	776,904	776,904
4. 이 윤	-	314,520	314,520
공급가액	-	15,750,000	15,750,000
5. 부가가치세	-	1,575,000	1,575,000
총 공사금액		17,325,000	17,325,000
보차도공제		- 3,039,781	감 3,039,781
합 계		14,285,219	14,285,219

□ 감리단 검토 내용

❍	디자인 그레이팅 설치공사는 당초 스틸그레이팅이였으나 BF(장애물없는 생활환경인증제) 심의결과에 따른 변경이며

❍	보차도 구간은 집중호우시 원활한 배수처리를 위하여 당초 스틸그레이팅으로 설치하는 것이 바람직한 것으로 판단됨

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 15백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.