문서번호	토목부-17976
결재일자	2019.10.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	10/04 김용제
협조

동측 우수관종 변경 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

동측 우수관종 변경 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

노들섬 하부가 모래지반으로 형성되어 우수관 굴착시 차수성 흙막이 공법 적용과 그에 따른 설계 기간이 소요되고 공사비가 증가 될 것으로 판단됨에 따라 우수관종을 변경 적용코자 검토 보고하는 사항임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 10.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

❍ 우수관로의 신설 위치가 옹벽하부 기초 밑에 설치되는 것으로 설계되어 있음

□ 변경내용 검토

○ 양녕로 주변에 설치되어 있는 기존관로는 CCTV조사결과 양호하여 기존관로 존치

○ 흄관을 PE이중벽관으로 변경설치

○ 순공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증감 금액
1. 직접공사비 계	24,687,681	23,937,644	-750,037
2. 제경비계	6,110,712	4,701,018	-1,409,694
순공사원가	30,798,393	28,638,662	-2,159,731
3. 일반관리비	1,632,314	1,517,849	-114,465
4. 이 윤	3,410,467	1,743,489	-1,666,978
공급가액	35,841,174	31,900,000	-3,941,174
5. 부가가치세	3,584,117	3,190,000	-394,117
총 공사금액	39,425,291	35,090,000	-4,335,291

□ 감리단 검토 내용

❍	동측 우수관 관종 변경을 검토한 결과 PE이중벽관으로 변경하는 것은 적정한 것으로 판단되며

❍	기반입된 흄관에 대해서는 도급자가 인수하는 것이 타당함

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 감) 4백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.