문서번호	급수운영과-20405
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
윤승구	최용진	10/07 유승효

단 수 작 업 계 획 서

(2019년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치및보수공사(성윤 노후밸브1-8))

2019. 10.

북부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2019년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치및보수공사 (장기계속단가계약)

- 공사개요 : ******************

- 시공회사 : **************

□ 지역별 단수계획

연번	작업지시번호	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
1	** *******	****************	*************	************* *********	****

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	8분	① 중간제수변(소프트) : 100㎜ 개→폐(2분), 폐→개(2분)
		② 중간제수변(소프트) : 100㎜ 개→폐(2분), 폐→개(2분)
퇴 수	5분	① 소화전밸브 : 100㎜ (5분)
배관	20분	① 이형관 및 소화전 접합 : 20분 - 이형관부설(3개소) : 15분 - 소화전부설(1개소) : 5분
제수밸브설치	10분	① 소프트밸브(신설) : 100㎜ (10분)
세척 및 통수	10분	① 소화전 : 100㎜ (10분)
합 계	53~60분

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	2F단관	100	개	2
2	소화전곡관	100X90	개	2
3	제수변(소프트)	100	개	1
4	지하식소화전	100	개	1

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.12W	대	1
2	양수기	50~100㎜	대	2

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계				3
*	***	*******	*****	**

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

*****************************************

**************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	********************************** *******************************	********* *************
업 체	************* ************ ************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

○ 공사안내간판, 현수막

○ 휀스, 유도등

○ 교통안내원 배치등

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2019. 10. 11.(금)

○ 단수시간 : 10:00 ~ 14:00(시간 중 1시간)

○ 단수지역 : ********************

○ 단수세대 : ****

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	***********	***	*	****	*******
	2	***********	***	*	****	*******

〇 통  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	***********	***	*	****	*******
	2	***********	***	*	****	*******
소화전밸브	3	***********	***	*	*********	*******

밸브조절 위치도

붙 임 : 단수 홍보 안내문 1부.  끝.