투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(업무지시전(예정공정표 변경 승인))

1.업무지시현장 : 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 두산건설 주식회사, 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 東亞建設産業 株式會社, 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 현대산업개발(주), 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 주식회사 동일기술공사, 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-10-07

3.지 시 내 용

가. 동감신봉 제19-281(2019.9.27.)호와 관련입니다.

나. “신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)” 8차공사의 “발파공법 변경(소규모진동제어발파 제외), 「근로기준법」 시행, 상수도 및 지장물 이설 등”으로 인한 예정공정표 변경승인 요청 건에 대하여 감리단 의견대로 변경승인 하니 조정된 사업비(△23,124백만 원)에 맞추어 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 업무연락전 1부.  끝.

주무관							김동수			터널건설과장					10/07 여용석
협조자
시행			토목부-18047									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2567						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개