문서번호	총무과-10944
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
김종민	황차호	代황차호		10/07 백지숙
협 조
	주무관		허민
	주무관		손명환

- 제로에너지건물(ZEB) 구축을 위한 -

난지창착스튜디오 태양광 발전설비 설치 변경 계획

2019. 10.

서울시립미술관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□	검토완료
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	검토완료 (법령, 지침)
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	신기술 일자리창출 에너지절감 및 온실가스 감축
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	중앙정부 자원활용
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	환경보전
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□	검토완료

- 제로에너지건물(ZEB) 구축을 위한 -

난지창착스튜디오 태양광 발전설비 설치 변경 계획

난지미술창작스튜디오 태양광 발전설비 설치 용량이 증가함에 따라 변경 계획을 보고 드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

◯「2022년 태양의 도시, 서울」(기후환경본부 녹색에너지과-22744, 2017.7.11.)

◯ 스마트 미술관 구축을 위한 ICT 기반 에너지효율화사업 3개년 추진계획

(서울시립미술관 총무과-3948, 2019.4.11.)

◯ 난지창작스튜디오 제로에너지건물(ZEB) 추진계획(시립미술관 총무과-7916, 2019.7.18.)

◯ 2019년 공공신재생에너지 지역지원사업 예산 추가요청(미술관 → 녹색에너지과)

□ 추진개요(변경)

대 상	에너지원	정격용량	태양광 설치장소(예정)
난지미술창작스튜디오	태양광	60kW (50kW → 60kW로 증가)	스튜디오 A, 전시장 상부 등

- 태양광 발전설비 용량 증가(기술용역 반영) : 기존 50㎾ → 60㎾

- 태양광 발전 정격용량 : 130㎾= 60㎾ + 70㎾(기 설치)

Ⅱ		추진계획

□ 추진방향

◯ 분산형 전원(電源)을 위한 신재생에너지(태양광) 발전설비 설치

◯ 신재생에너지(태양광) + 에너지저장장치(ESS) 연계한 시스템 설치

◯ 안전한 신재생에너지(태양광) 발전설비 설치를 위한 각종 지침 준수

□ 추진일정

◯ 추진기간 : 2019. 7. ~ 11.

◯ 세부절차 및 일정

사업단계		사업기간	주요내용	추진현황
사업계획 수립		2019. 7.	〇 태양광 발전설비 설치 계획	기 완료
기술용역	실시설계 (태양광 발전)	2019. 7.~ 8	〇 기술용역타당성 심사의뢰 〇 기술용역 시행 (실시설계 및 구조안전진단)
	구조안전진단
기술용역(감리) 발주		2019. 9. ~ 11	〇 기술용역(감리) 시행	추진 중
공사 시행 및 준공		2019. 9. ~ 11	〇 시공 발주 및 준공

□ 소요예산 : **********(*********************)

사업단계		예 산(천원)	예산과목	계약 방법	추진현황
합 계		*********
기술용역	실시설계 (태양광 발전)	******	***	****	기 완료
	구조안전진단			****
태양광 발전설비 설치		*********	***	********************** ******************** *************	추진 중
		********	*****
기술용역(감리)		*******	***	****

Ⅲ		달성목표

◯ 제로에너지건물(ZEB) 구축 : 난지창작스튜디오

- 적용기술(방법) : 태양광 발전 + ESS + 노후 냉난방기 교체 등

⇒ 친환경 에너지자립형 창작스튜디오로 자리매김

◯ 에너지사용량과 온실가스 배출량 각각 50% 이상 감축(2016년 대비) 추진

- 에너지 사용량 감축 →  온실가스(미세먼지 포함) 배출량 감축

◯ 녹색뉴딜 사업을 통한 신기술 일자리 창출

Ⅳ		행정사항

◯ 태양광 발전설비 용량 증가에 따른 신속한 사업 발주 및 준공

◯ 사업추진을 위해 관련부서(서부공원녹지사업소)와 적극적 업무 협의. 끝.