문서번호	현장민원과-15751
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		현장민원과장	강서수도사업소장
서주태		이원철	10/07 배현숙
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

벽체형 계량기함 PE보온재 구매·설치 계획

2019. 10.

강서수도사업소

(현장민원과)

벽체형 계량기함 PE보온재 구매·설치 계획

겨울철 한파에 취약한 복도식아파트 벽체형 수도계량기에 보온성능이 우수한 PE보온재를 설치하여 동절기 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 추진근거

❍ 수도계량기 벽체형 보온재 구매·설치 계획

(계측관리과-8053호, ‘19. 9. 2)

□ 추진경위

❍ 보온재 설치대상 조사(조사기간 : ‘19.7.22 ~ 8.13)

❍ 벽체형 계량기함 PE보온재 설치대상 제출(현장민원과-13225, ‘19.8.20)

❍ 벽체형 보온재 구매 설치 예산 재배정(기획예산과-10579, ‘19.9.5)

Ⅱ		현 황

□ 설치 현황

❍ 연도별 설치현황 : 총 9,192세대

구 분	세대수	설 치 장 소
2014	444	신도림우성5차아파트외 1
2015	387	장미아파트
2016	3,302	신도림 미성아파트외 6
2017	2,995	가양6단지아파트외 1
2018	2,064	구로한신아파트외 1

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진방향

❍ PE보온재 설치로 동파취약 공동주택의 계량기 동파발생 최소화

❍ 계량기 보호함과 보온재의 틈새를 최소화하여 보온효과 극대화

□ 추진개요

❍ 구매물품

- 품    목 : 벽체형 계량기함 PE보온재

- 재    질 : 발포 폴리에틸렌(PoamedPE)

- 규    격 : 15mm 벽체형 계량기함 맞춤제작

❍ 구매 및 설치

- 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

- 설    치 : 물품 납품업체에서 직접 설치(시공)

※ 구매단가에 현장조사비, 설치비, 폐기물처리비 등 포함된 가격

❍ 소요예산

- 소요예산 : 36,014천원(조달수수료 0.54% 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

(수선유지비)

□ 설치대상

❍ 설치대상 선정기준

- 방풍창이 없는 복도식 세대로 동파발생 위험이 높은 세대

계량기에 열선 설치 등으로 화재발생 위험이 있는 세대는 제외

보온재 설치·관리 의사가 있으며 설치 시 계량기 교체 용이한 장소

❍ 설치대상 : 아파트 1개단지 1,990세대

단지명	소재지	세대수	최근3년간 동파건수
목동14단지	양천구 목동로 130	1,990	55

□ 제품 선정

❍ 제품특성(비교)

제조사	**	****	****
단 가	*******	*******	*******
재 질	********	********	********
특 징	******	******	*******
램 프	*	*	*
장 점	*****	*****	*****
단 점	*****	*****	*****
사 진

❍ 선정제품 : 백제(φ 15mm용)

❍ 선정사유 : 3개 회사의 제품은 동일한 재질(PE)로 보온성능이 비슷하나,

검침이 용이하고 가격이 저렴한 백제 제품으로 선정

□ 추진일정

❍ 벽체형 PE보온재 구매(발주)              : 10. 10(목)까지

❍ 대상아파트 관리사무소 보온재 설치일 협의 : 10. 18(금)까지

❍ 보온재 설치 검수 및 완료                  : 11.  5(화)까지

Ⅳ		행 정 사항

❍ 보온재 시공상태 점검

- 보온재 설치 시 현장방문하여 아파트관리사무소 직원과 합동 점검

붙임 : 1. 벽체형 계량기함 PE보온재 설치대상 1부.

2. PE보온재 설치 실적 1부.

3. 제조사별 보온재 비교.  끝.