문서번호	토목부-18034
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	전결 10/07 김용제
협조

낙하방지망 설치및해체 교통안전시설설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

낙하방지망 설치및해체 교통안전시설설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 보행육교 낙하방지망 설치 및 해체에 따른 교통안전시설설치 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 10.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

○ 보행육교 낙하물 방지공 시공을 위한 교통통제 및 안전시설물 설치 철거

○ 용산경찰서에 보행육교 낙하물 방지공 설치 철거관련 도로공사 신고

□ 검토내용

○ 공사비 검토

공 종	규격	단위	수량	단가	금액 (직접공사비)
9.보행육교
교통통제 및 안전시설물 설치 철거		식	1	14,821,721	14,821,721

구 분	당 초	변 경	증감 금액
1. 직접공사비 계		14,,821,719	14,,821,719
2. 제경비계		2,766,420	2,766,420
순공사원가		17,588,139	17,588,139
3. 일반관리비		932,171	932,171
4. 이 윤		1,739,690	1,739,690
공급가액		20,260,000	20,260,000
5. 부가가치세		2,026,000	2,026,000
총 공사금액		22,286,000	22,286,000

□ 감리단 검토 내용

❍ 보행육교 낙하방지망 설치 및 해체시 교통안전시설 설치는 적정한 것으로 판단됨

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에 따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 22백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.