문서번호	토목부-18028
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	전결 10/07 김용제
협조

보행육교 낙하물방지공 설치해체 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

보행육교 낙하물방지공 설치해체 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 보행육교 낙하물방지공 매달기가 와이어 로프로 흔들림등 안전성이 결여되어 강성이 큰 강관 파이프로 변경 설치코자 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 10.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

낙하물 방지공 설치

당초(88.6m ):

변경( 112.3m):

□ 변경내용 검토

○ 낙하물 방지공 메달기가 와이어 로프(8mm)로 흔들림에 불안정이 예상됨

○ 한강대교 양녕대로 8차선 위에 설치 됨에 따른 강성이 큰 재료가 요구됨

○ 강성재료인 강관 파이프로 변경이 요구됨 (태풍 대비 안전 확보)

○ 낙하물방지공(WIRE ROPE+그물망)으로는 도로하부 낙하물 차단이 어려움

○ 그물망 대신 합판을 설치하여 낙하물 완전 차단하여  안전 확보가 필요함

○ 설계 수량 누락

○ 수량 검토

구분	공 종	규 격	연장(m)	수량(m2)	비고
당초	낙하물방지공 설치해체	강관(φ48.6×2.4㎜), 그물망2cm	88.6m (도로구간)	532
변경	낙하물방지공 설치해체	강관(φ48.6×2.4㎜), 합판	122.3m (도로+보도구간)	777

○ 낙하물방지망 변경 검토

(당초)                      (변경)

○ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증감 금액
1. 직접공사비 계	4,268,236	32,655,756	28,387,520
2. 제경비계	964,125	8,918,592	7,954,467
순공사원가	5,232,361	41,574,348	36,341,987
3. 일반관리비	277,315	2,203,440	1,926,125
4. 이 윤	476,658	3,752,212	3,275,554
공급가액	5,986,334	47,530,000	41,543,666
5. 부가가치세	598,633	4,753,000	4,154,367
총 공사금액	6,584,967	52,283,000	45,698,033

□ 원설계자 검토의견

❍ 보행육교 하부는 그물망 대신 합판추가 설치가 적정

❍ 보행육교 길이중 양녕로 구간과 단지내부 통행로 구간 설치

❍ 하부 합판을 고정시키기 위해 와이어로프대신 강관파이프로 변경

□ 감리단 검토 내용

❍	낙하물 방지고 매달기가 와이어 로프로 흔들임에 불안정이 예상되므로 한강대교 8차로 교통량이 많은 부분의 상부안전을 확보하기 위해 강성재료인 강관파이프로 변경은 적정한 것으로 판단됨

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에 따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 46백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.