문서번호	소방행정과-10769
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
신춘수	박충규	김명식		10/07 정재후
협 조	구급팀장		곽민규
	담당자		김경오

- (가칭)북아현119안전센터 준공에 따른 - 미근119안전센터 이전계획 보고

소 방 행 정 과

[장비회계팀]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- (가칭)북아현119안전센터 준공에 따른 -

미근119안전센터 이전계획

북아현119안전센터 신축청사 공사 준공이 도래함에 따라 깨끗하고 쾌적한 청사

환경에서 대시민 소방서비스를 원활히 제공하기 위한 미근119안전센터의 신축

청사(재건축) 이전 계획임.

Ⅰ		이전개요

신축청사 이전

일   시 : 2019. 11. 1.(금) 1일간

장   소 : 서울시 서대문구 북아현동 1016-1(북아현로 37)

이전방법 : 포장이사 – 약 4,000천원 이상 소요 예정(견적의뢰 중)

이전대상 : 미근119안전센터 보유 소방장비 일체 및 물품

신축청사 현황

규    모 : 지상3층, 연면적 885.46㎡(대지면적 1,672㎡)

면적 및 용도

구 분	계	1층	2층	3층
면적(㎡)	885.46	480.21	206.68	198.57
용 도	-	사무실, 차고, 대기실, 수관건조실, 개인안전 장비실 등	대기실, 휴게실, 심신 안정실, 회의실, 샤워실, 세탁실, 창고 등	식당, 체력단련실, 센터장실, 의소대사무실, 보일러실 등

신축청사 위치도 및 조감도

신축청사 층별 평면도

지상 1층	지상 2층

지상 3층	옥탑

Ⅱ		세부 이전계획

준비기간 : 2019. 10. 21. ~ 10. 31.(11일간)

이전물량 : 이전물품 및 불용물품 목록 제출(미근119안전센터)

- 제출기한 : 10.10.(목) 한

- 사무용집기류 및 비품, 소방장비, 식당비품(주방기구), 기타물품 등

진행부서 지정 운영

- 총    괄 : 소방행정과장(장비회계팀장)

- 실무책임 : 미근119안전센터장(각 팀장)

각 부서별 책임자 지정

구 분	내 용	책 임 자
소방차량	․소방펌프차 / 물탱크차 / 구급차 / 이륜차	챠량․장비주임
불용물품	․미근119안전센터 불용물품 처리(11월 중)	챠량․장비주임
통신장비	․지령망 / 유무선 등 출동장비 일체	종합상황실
사 무 실	․전산장비 / 서류 기타물품 등	센터장
대 기 실	․사용가능 침구류 / 개인별 사물 등	센터장
식당비품	․냉장고 등 주방기구	센터장
소방장비	․진압 / 구조 / 구급 / 호흡보호장비 등 장비일체	센터장
시 설 물	․미근청사 / 전기 / 수도 / 가스 등 폐전, 청사시건	센터장
시 설 물	․신축청사 / 전기 / 수도 / 가스 등 연결	신축 총괄담당
미근청사 반납 등	․미근청사 이전 후 소방청사 기능 해제 및 市 재무과 반납(본부 자산관리과 협의처리 /10~11월)	신축 총괄담당

※ 이전 운송업체 : 서류박스, 에어켑, 테이프 등 필요한 재료 사전 제공

일반사항

- 이전 당일 미근안전센터 직원을 현 청사 및 신축청사에 각각 배치하여 감독

- 일정에 따라 순차적으로 부피가 큰 물건부터 이동 배치 후 정리정돈

- 개인사물 등 귀중품은 개인이 휴대하고

- 고가장비 및 전산장비 등은 파손 및 분실에 각별히 주의하고

- 물품 이동시 신축청사 훼손 및 파손에 각별히 조심하여 운반

- 신축청사에서 사용하지 않는 불요불급 물품 등은 사전 정리하여, 구 청사(미근) 내              보관 할 수 있도록 조치(차량장비주임 별도 불용계획 수립 시행)

Ⅲ		추 진 일 정

주요일정(안)

- 북아현청사 간판, 차고문, 수관건조대 설치        : 10.04. ~ 10.11.

- 북아현 신축청사 준공 및 청소                    : 10.18.

- 북아현 신축청사 물품 등 배치                   : 10.21. ~ 10.31.

- 미근119안전센터 이사 준비                     : 10.21. ~ 10.31.

- 미근 신축청사 이전, 통신망설치 및 업무개시     : 11.01.

- 준공식(개소식)(행정팀 별도계획 수립 추진)      : 11월 중

Ⅳ		행정사항

청사이전 관련 직원교육 실시

- 일  시 : 2019. 10. 21.(월)  14:00

- 장  소 : 미근119안전센터 사무실

- 교  관 : 소방행정과장(장비회계팀장)

- 대  상 : 청사이전에 따른 제반사항 등

신축청사 이전 안내

- 기  간 : 2019. 10. 21.(월) ~ 이전기간 내

- 방  법 : 홈페이지 및 미근119안전센터 구 청사. 지역신문 등

- 내  용 : 미근청사 이전 및 신축공사(재건축) 규모 등

- 담  당 : 소방행정과(행정팀/장비관리팀/홍보교육팀)

소방재난본부(소방행정과/소방감사담당관) 청사이전계획 보고

- 일  시 : 2019. 10. 21.(월)

- 담  당 : 소방행정과 행정팀  인사담당

이사기간 중 출동태세 방안 강구

- 기  간 : 2019. 11. 1.(1일간)

- 담  당 : 재난관리과(대응총괄팀) / 현장대응단(현장지휘팀)

미근청사 이전 후 불용물품 처리

- 기  간 : 2019. 11월 중

- 담  당 : 차량․장비담당(장비주임)

미근청사 시 재무과 반납(서대문경찰서 재사용 등) 처리

- 기  간 : 2019. 10월 ~ 11월

- 담  당 : 청사신축 총괄담당

각 부서별 해당책임관은 일정별 추진에 만전을 기하여 주시고, 미근119안전센터장은 비번직원에 대하여 초과근무수당을 지급하고 신축청사로 이전이 완료되면 이상 유무를 확인 후 소방행정과장에게 최종 보고하시기  바랍니다.  끝.

붙임 1. 신축청사 평면도 1부(종이문서).

2. 신축청사 3층 센터장실 변경도면 1부.

3. 신축청사 이전물품 및 불용물품 목록 1부.  끝.