문서번호	치수과-3512
결재일자	2019.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		손창열	10/07 代손창열
협조

『한강공원 보행잔교 설치 타당성조사 및 기본설계 용역』   주요 현안사항 보고

2019. 10.

한강사업본부

(치 수 과)

기본계획 용역 주요 현안사항 보고

한강공원 보행잔교 설치 기본계획 및 타당성 용역 추진에 따른 현안사항을 아래와 같이 보고 하고자 함

□ 용역개요

○ 위    치 : 한강공원

○ 용역내용 : 한강공원 보행잔교 설치 기본계획 및 타당성 수립

○ 용 역 비 : 8천만원

○ 용역기간 : 2018.11.27 ~ 2019. 10.31

□ 추진경위

○ ‘19. 2.~6. : 보행잔교 디자인 검토 (안)

○ ‘19. 6. 5. : 유관부서 전문가 및 관계자 회의

○ ‘19. 6.20. : 한강시민위 기획위원회 개최

○ ‘19. 9.26. : 기본계획 (안) 최종보고

□ 현안사항 보고내용

○ 기본계획 (안) 보고를 위한 경관설계 및 조감도 작성비 추가

○ 기술자문비 및 현황분석, 자료수집비 제외

○ 사업비 변경내역                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	80,460,000	107,328,000	증 26,868,000
직접 인건비	23,242,454	23,242,454	-
보고서 인쇄비	700,365	700,365	-
기술 자문비	3,750,000	-	감 3,750,000
경관설계 및 조감도	-	38,300,000	증 38,300,000
현황분석 및 자료수집	10,124,558	-	감 10,124,558
제경비	25,566,700	25,566,700	-
기술료	9,761,831	9,761,831	-
부가가치세	7,314,590	9,575,130	증 2,442,540

□ 조치계획

○ 상기 현안사항 보고내용과 같이 적용하고, 추후 설계변경시 정산처리 코자 함.

- 용역비 증 26,868천원(신규공종 낙찰율 적용 87.078%)

○ 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경개선, 한강접근체계개선, 한강공원 나들목 환경개선, 시설비

따로붙임 : 변경설계 내역서 1부. 끝.