“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	(총차 및 1차)계약변경 및 2차 계약의뢰(남산 회현자락)

1. 한양도성도감-10065(2019.10.1.)호와 관련하여 2차분 계약금액 등 수정과 관련입니다.

3. 우리본부에서 시행중인「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사 문화재상주감리 용역」에 대한 변경계약(총차 및 1차) 및 2차 계약을 의뢰하였으나 2차 계약의뢰 내용에 오류사항이 있어 수정하여 다시 보내드리니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

- 계약건명 : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 문화재 상주감리

- 계약상대자 : ******************

- 계약금액 : ********************************

- 전체 계약기간 : 2018.11.9.~2020.1.8.(1차 2018.11.9.~2019.10.9.)

나. 총차 및 1차 변경내용 : 계약금액 및 준공기한(공사기간) 변경

구 분		변경전	변경후	증·감
계약 금액	총차	332,133,000원	332,133,000원	증감 없음
	1차	266,000,000원	266,000,000원
용역 기간	총차	2018.11.9.∼ 2020.1.8.	2018.11.9.∼ 2020.4.13.	96일 연장
	1차	2018.11.9.∼ 2019.10.8.	2018.11.9.∼ 2020.1.21.	105일 연장

- 용역기간 연장사유: 남산공원 매점 이전지연에 따른 공사기간이 연장됨에 따라 감리용역 기간을 연기함(향후 명도소송 진행결과에 따라 추가 연기예정)

다. 2차 계약의뢰(계약금액 및 용역기간 착오내용 수정)

구 분	계약금액	용역기간	비고
변경전	332,133,000원	2018.11.9.∼ 2020.4.13.	총차
변경후	66,133,000원	2020.1.22.∼ 2020.4.13.	2차

라. 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 감리비

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 총차 및 1차 변경계약 검토 보고서 1부.

3. 합의각서 및 산출내역서 등 관련서류 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	代왕승찬		한양도성도감과장	10/07 안중호
협조자	계약총괄팀장	이정렬
시행	한양도성도감-10295	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)