의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-18154
결재일자	2019.10.8.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	총무부장

주무관		터널건설과장	토목부장	시설국장		결재
이상근		代김동수	김용제	10/08 代정진일
협 조
	주무관				윤효진

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 22번, 김기대 의원, 도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

따로붙임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

김기대 의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

22. 신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사

1) 사업방침서

2) 공사 추진현황(예산투자 현황 포함)

3) 공사 현장 무단 점유자 명도소송 추진 현황

4) 저류조 가시설 공사 착공 계획

□ 신림~봉천터널 도로건설공사 관련

1) 사업방침서

○ ‘10.07.21. : 공영차고지 추가 조성계획 방침 수립(부시장 방침 제270호)

○ ‘14.07.17. : 신림공영차고지조성 사업계획 변경

※ 방침서 별첨

2) 공사 추진현황(예산투자 현황 포함)

□ 사업개요

○ 위    치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대

○ 규    모 : 공영주차장 및 빗물저류조 조성

- 주 차 장 : 버스101대(지상, 지하1층), 관리동 및 부속시설

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(면적 7,000㎡, 저류용량 35,000㎥)

○ 사업기간 : 2018. 10. ~ 2021. 09.

○ 총사업비 : 66,390백만원(,19년 예산 1,005백만원)

□ 공사 추진현황

○ '18.10.01. : 공사착공

○ '19.09.20	. : 문화재 지표조사

○ '19.09.30	. : 공사장내 수목제거

○ '19.10.31	. : 문화재 표본조사 실시

□ 예산투자 현황

구분(내용)		계	'18년 이전	'19년	'19년 이후
*		******	******	*****	******
* * *	******	***	***	*	*
	***	*****	*****	*	*
	***	******	*****	***	******
	***	******	******	*	*
***		*****	***	***	*****
*****		**	**	*	**

3) 공사 현장 무단 점유자 명도소송 추진 현황

○ 명도소송 대상 및 추진현황(’19.4.~현재)

연번	점 유 자	점 유 물 건	면적(㎡)	사 건	진행현황	비 고
*	*** ******	********** *********	*****	****** ****** ****** ****	*****	****
*	*** ******	********* ******	***	****** ****** ************	***** ***	****
*	*** ******	******** *******	***	****** ****** ******* ****	*****
*	*** ******	******** ******	***	****** ****** ******* ****	*****

○ 진행 사항

- ‘19.04.  : 명도소송 제기

- ‘19.10.  : 소송진행 완료

4) 저류조 가시설 공사 착공계획

○ ‘19. 12. 10. : 공사구간 지반정지

○ ‘20. 01. 20. : 강남순환도로측 법면 지장물확인(줄파기)

○ ‘20. 02.     : H-PILE 천공 및 항타

붙임 : 방침서 2부.  끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	여용석
	☎ 3708-2566	주무관	이상근
	작 성 일 : 2019. 10.

이곳에 본문을 입력하세요