등록번호

청소행정과-24424

주무관

시설장비팀장

청소행정과장

시민친화국장

부구청장

등록일자

2019.10.7.

이선우

정병찬

문성수

송인상

10/08

신상철

결재일자

2019.10.8.

공개구분

부분공개(5)

협조

재산관리팀장

박형선

예산팀장

장원옥

재무과장

박수돈

을지로5가 공무관 휴게실 건립을 위한

청사 기금 활용 계획

시민친화국

청소행정과

을지로5가 공무관 휴게실 건립을 위한

청사 기금 활용 계획

우리구 청사 기금을 활용하여 을지로5가 공무관 휴게실을 건립하여 청사부족 해소 및 자산 가치를 증대하고, 현장 근무자 휴게환경 개선으로 사기를 진작시키고자 함

Ⅰ		추진근거

구청장 지시사항 제20호62번(2018.9.) 현장근무자 처우개선 방안마련

청소행정과-417(2019.1.) 을지로5가 공무관 휴게실 건립계획

중구 공용·공공용의 청사시설 부지매입 기금 설치 및 운용 조례

Ⅱ		추진배경

을지로5가 공무관 휴게실이 2017. 5월 화재로 철거된 후 을지경로당 3층을 사용중이나 장소가 협소하여 신축추진

세운재정비촉지지구 재정비 사업으로 공원녹지과 현장근무자 대기실 및 산림동 공무관 휴게실 철거 예정으로 대체장소 필요

Ⅲ		추진경위

2017.5.24. : 을지로5가 공무관 휴게실 화재발생

2017.8.03. ~ 9.11. : 건축물 화재안전진단 용역

- 철거단계 E등급 평가

2017.10.23.~11.11. : 건축물 철거공사 실시설계 용역

2017.12.28. : 화재피해 재해복구비 지급(행정공제회)

- 보험보상금 288,900,000원 세입처리

2017.12.22.~2018.01.17. : 건축물 철거공사

2018.02.08. : 건축물 말소처리

2018.12.03. : 2019년 구유재산 관리계획 구의회 의결

2019.05. : 타당성조사 완료

Ⅳ		사업개요

사업내용

❍ 위   치  : 동호로35길 16 (소유주 : 중구청)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년

❍ 건축규모 : 지하 2층 ~ 지상 7층

❍ 사업면적 : 대지 160.7㎡, 연면적 798㎡

❍ 총사업비 : 2,479,980천원

Ⅴ		재원조달방안

총사업비 : 2,479,980천원

❍ 2019년 소요예산 :   133,780천원(타당성 조사 및 기본설계용역)

❍ 2020년 소요예산 : 2,346,200천원(공사비, 감리비, 시설부대비 등)

(단위: 백만원)

항 목	소요예산	재원구분		투입시기	비 고
		시	구
계	2,480	-	2,480
타당성 및 기본설계용역 등 사전절차 이행	133.8	-	133.8	2019	일반회계
공사비	2,091.5	-	2,091.5	2020	기금
부대비(감리비, 시설부대비) 및 예비비	254.7	-	254.7	2020~2021	기금

Ⅵ		기금활용계획

사용목적

❍ 을지로5가 공무관 휴게실 신축 공사 진행

기금 사용액 : 2,346,200천원

사용 검토

□ 기금명칭 : 서울특별시 중구 공용·공공용의 청사시설 부지매입 기금

□ 조 성 액 : 20,469백만원(2019년도말)

□ 기금사용 적합여부 : 적 합

- 「중구 부지매입 기금 설치 및 운용 조례」제4조(기금의 용도)

• 건축비 등 그 밖의 부대경비 (타당성 조사 등 용역비, 설계비 등)

기금 사용 절차

기금활용 계획수립		기금운용계획 방침수립		기금운용 심의회 개최		구의회 제출 및 승인		세출편성
’19. 10월	➡	‘19.10월	➡	‘19.10월	➡	‘19.11~12월	➡	‘19.11~12월
청소행정과		재무과		재무과		재무과→구의회		재무과

Ⅶ		향후일정

2019. 10. : 투자심사, 기금운용계획 방침 수립 및 기금운용 심의회 개최

2019. 10. ~ 12. : 구의회 승인 및 세출편성

2019. 10. ~ 2020.03. : 설계공모 및 설계용역

2020. 04. ~ 2021.03. : 시공업체 선정 및 착공

2021. 04. ~ 06. : 준공 및 운영

Ⅷ		행정사항

재무과 : 기금액(2,346,200천원) 세출 예산 반영.  끝.