＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	납품기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(제2정수장 공기압축기 구매설치)

우리센터에서 시행하는“제2정수장 공기압축기 구매설치”건에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 건    명 : 제2정수장 공기압축기 구매설치

나. 사업개요 : 공기압축기 2대 구매설치(부대설비 포함)

다. 납품기한 - 당초 : 2019. 9. 23. ∼ 2019. 11. 07. ⇒ 변경 : 2019. 9. 23. ∼ 2019. 11. 30.

라. ******************

마. ************************

바. 연기사유 : 선행되는 수배전반교체사업(제2정수장 여과지) 및 전원케이블 교체 전기공사가 완료 된 후 기기를 설치코자 함

사. 지체상금 : 미부과

아. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비(2정수장 공기압축기 교체)

붙임 : 1) 납품기한 연기 검토보고서 1부

2) 합의서 1부.  끝.

	정수시설과장
★주무관	조광호		정수시설과장	10/08 양영민
협조자	주무관	김재성
시행	정수시설과-11003	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02-3146-5772	/전송	02-3146-5707	/	lovetou77@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)